문서번호	행정지원과-17744
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
박순덕	백종준	송종선		10/14 박동석
협 조

『온라인 수질연속자동감시시스템 구매설치』    설계변경 정산보고

2021. 10.

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『온라인 수질연속자동감시시스템 구매설치』

설 계 변 경  정 산  보 고

우리사업소에서 시행중인 「온라인 수질여속자동감시시스템 구매설치」에 대해 준공전 변동사항을 다음과 같이 설계 내역에 반영하여, 변경계약하고자 보고 함.

Ⅰ		계약현황

□ 추진근거

❍ 계약체결 통보(온라인 수질연속자동감시시스템 구매설치)(재무과-21064, 2021.04.22.)

□ 현황

❍ 건    명 : 온라인 수질연속자동감시시스템 구매설치

❍ 공사기간 : 2021. 4. 22. ~ 10. 19.

❍ 계약금액: *********************************

❍ 계약대상자: *****************

Ⅱ		관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

❍ 지방자치단체를 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규176호, 2021.9.6.)

- 제1장 입찰 및 계약집행기준 제8절 보험료 사후정산 등

Ⅲ		설계 변경 내역

❍ 설게변경 사유 및 내용

- 지방자차단체를 입찰 및 계약집행기준 제1장 제8절(보험료 사후정산 등)에 따라 준공 전 정산 자료료 미제출에 따른 계약금액 감액

- 계약체결 시 계약내역서에 설치원가 미작성으로 재료비, 노무비, 제경비 등 미포함되어 본 설계변경 내역에 포함

❍ 변경금액

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
계약금액	***********	***********	*********

❍ 변경(제경비) 세부내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
*****	*******	*******	*
*****	******	******	*
********	******	*	*******
*********	******	*	*******
*****	*******	*******	******
***	*******	*******	*******
****	*******	*******	*
*****	**********	**********	*
****	***********	***********	********
*****	**********	**********	*******
***	***********	***********	********

ⅳ		행정사항

❍ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 함

*****************

*********************************

*************************************

********

****************************************

*********************

붙임: 설계변경내역서 1부.  끝.