문서번호	방재시설부-13106
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
이성우		오열상	10/14 박홍봉
협조	물재생기획팀장		조장환
	건축관리과장		조승제

「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」

공기연장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

`

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」

공기연장 검토보고

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』관련 서울물재생 체험관 및 상부공원화 공사의 원활한 추진을 위한 공기연장에 대한 검토보고임

1		관련근거

□ 물재생체험관 및 상부공원 조성 실무TF 6차 회의결과 및 상부공원 명칭 알림(물재생계획과-10356호, 2021. 9.30.)

○ 전시 콘텐츠 방향성 보완과 준공 전 시사회 시행 및 추가공사를 위해 필요한 공사기간은 사업부서에서 연장 시행

2		사업개요

□ 사 업 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

□ 위    치 : 서울특별시 강서구 양천로 201(마곡동, 서남물재생센터 內)

□ 규    모 : 고도처리 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일, 상부공원화시설, 서울물재생체험관

□ 사업기간 : ’09.11.09. ~ ’21.10.15.

□ 총사업비 : 349,732백만원

□ 감리/시공 : ㈜도화엔지니어링외 1개사 / 대림산업(주)외 5개사

< 서울물재생체험관 조감도 >	< 상부공원 조감도 >

3		추진경위

□ ’09.11.09. : 고도처리 개량 착공

□ ’12.02.06. : 시설현대화 착공

□ ’12.02.29. : 고도처리 개량 준공

□ ’20.03.15. : 수처리시설 시운전 완료

□ ’20.07.19. : 초기우수처리시설 시운전 완료

□ ’21.04.12. : 시설현대화 준공

□ ’21.04.16. : 상부공원 및 서울물재생체험관 착공

□ ’21.10.13. : 상부공원 및 서울물재생체험관 내·외부 마감공사 중(공정율 99.93%)

4		현안사항 및 애로사항

□ 현안사항

○ 시 주관부서(물재생시설과)의 전시콘텐츠 보완 및 추가공사 요청에 따른 절대공기 부족

- 전시콘텐츠 보완 : 홍보영상 및 그래픽 패널 표현기법 변경

- 추가공사 요청사항

구분	세부내용	비고 (개략공사비)
진출입 차량동선 안전시설	메쉬휀스(H=1.8m) 1,963m	575백만원
교통안내표지 등 안전 및 편의시설	진입도로 노면유도선(B=1.0m) 875m CCTV 4개소, 위험표지 10개소 안전경보기 2개소(계근대, 음폐수차량 간섭구간) LED전광판 2개소, 공원안내판 6개소 스피드셔터 1개소(출입구 개폐시설) 자동인식차단기 1개소	235백만원
진출입로 주변 노후 포장 도로 정비	기존 도로 절삭후 아스콘 포장 38a 측구 및 배수시설 설치	172백만원
시설현대화 내부 관람동선	관람로 도색(B=1.2m) 710m 시설설명판(계통도 외) 9개소	110백만원

□ 애로사항

○ 철강재 가격 상승에 따른 납품단가 보전을 요구하며 하도급업체의 태업, 납품업체의 납품지연으로 후속공정 지연(현재는 협의완료)

○ 서울물재생체험관 공기준수를 위해 휴일없이 공사를 추진하여 근로자 피로도 누적으로 안전사고 발생 우려

5		책임감리원 검토의견

□ 전시 콘텐츠 보완일정에 따라 전시콘텐츠 시연 일정 이후로 공사기간 연장이 필요하며,

□ 이용자 안전 및 편의시설 추가분에 대한 공사 소요일 검토결과 ’22년 2월 4일로 공사기간을 변경(112일 연장) 추진함이 적정함

○ 분야별 준공기한 연장요청 현황

구 분		당초	변경	비고
공사	전체분	2009.11.09.∼2021.10.15.	2009.11.09.∼2022.02.04.	112일 연장
	13차	2021.04.16.∼2021.10.15.	2021.04.16.∼2022.02.04.	112일 연장
건설폐기물 처리용역	전체분	2009.12.02.∼2021.10.15.	2009.12.02.∼2021.12.10.	56일 연장
	10차	2021.04.19.∼2021.10.15.	2021.04.19.∼2021.12.10.	56일 연장
전면책임 감리용역	전체분	2009.11.30.∼2021.11.15.	2009.11.30.∼2022.02.04.	81일 연장
	13차	2020.11.11.∼2021.11.15.	2021.11.11.∼2022.02.04.	81일 연장

□ 예산조치계획 : 당초 사업비 범위 내에서 시행 가능

구 분	계약금액(백만원)			비고
	당초	변경	증·감
계	334,647	336,054	증)1,407
공사	319,944	321,036	증)1,092	개략공사비
전면책임감리용역	14,703	15,018	증) 315

6		검토의견 및 조치계획

□ 상기와 같은 실정으로 시 주관부서(물재생시설과)의 전시콘텐츠 보완, 안전 및 편의시설 설치 요청에 따른 준공기한 연장 실정보고 건에 대해 승인처리하고,

□ 각 분야별 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 하며,

구 분	’21년										’22년			비 고
	10		11				12				1	2
전시콘텐츠 보완
메 쉬 휀 스														- 자재발주(10일) - 현장설치(28일)
			자재발주		설치(50m/일)
안전시설 및 노후도로 정비
견 학 동 선
부 대 공 사														’22.02.04 준공

□ 준공기한 연장에 따른 추가소요 감리비는 시 주관부서(물재생시설과)에 예산조정(시설비→감리비)요청하여 추후 설계변경하고자 함

7		준공기한 연장내용

□ 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

○ 준공기한(전체분, 13차) : (당초) ’21.10.15. → (변경) ’22.02.04.

○ 귀책소재 : 발주청(도시기반시설본부)

○ 지체상금 : 미부과

□ 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 건설폐기물처리용역

○ 준공기한(전체분, 10차) : (당초) ’21.10.15. → (변경) ’22.12.10.

○ 귀책소재 : 발주청(도시기반시설본부)

○ 지체상금 : 미부과

□ 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역

○ 준공기한(전체분, 13차) : (당초) ’21.11.15. → (변경) ’22.02.04.

○ 귀책소재 : 발주청(도시기반시설본부)

○ 지체상금 : 미부과

붙임  1. 물재생시설과 공문 1부.

2. 계획도면 및 현장사진 각 1부.  끝.