문서번호	기전과-7229
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안재윤		10/14 이재권
협 조

『2021년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)-1구역』

설계변경 검토보고

2021. 10.

성동도로사업소

(기 전 과)

『2021년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)-1구역』

설계변경 검토보고

「2021년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)-1구역」의 설계변경 요청이 있어 관련 서류를 검토하여 보고 드림

▣ 관련근거

○ 대영GE21N-10-04호

- 제1회차 설계변경 요청서 제출

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)-1구역

○ 계 약 자 : ****************

○ 계약금액 : *************

○ 공사기간 : 2021. 03. 10. ∼ 2021. 12. 20.

○ 감 리 원 : *********************

▣ 설계변경 현황

○ 주요 물량 변경 사항

순번	공 종		단위	수량		변 경 사 유
				당초	변경
1	제어기(완성품) 표준형 설치	신설	조	8	21	작업지시 완료물량 및 작업예정물량 반영
2	차량신호등 설치 1면 3색	신설	조	1	23
3	경보신호등 설치 1조	이설	조	1	10
4	보행신호등 설치 1조	신설	대	1	36
5	시각장애인용 음향신호기 본체 설치	신설	대	1	175
6	시각장애인용 음향신호기 압버튼 설치	신설	본	1	170
7	교통신호등지주 신설(관급) Ø200㎜	신설	본	1	10
8	교통신호등지주 신설(관급) Ø150㎜	신설	본	1	10

○ 설계변경 사유

- 관내 노후지주 교체 및 규제심의사항 처리를 위해 낙찰차액 사용 등 계약금액 조정

- 작업지시 완료 및 예정물량 적용등 물량변동 사유 발생

○ 공사비 변경내용

구 분		당초	변경	증 · 감 액
도급비	공급가액	425,211,719원	466,363,637원	41,151,918원
	부가가치세	42,521,171원	46,636,363원	4,115,192원
	계	467,732,890원	513,000,000원	45,267,110원

▣ 조치의견

○ 상기와 같이『2021년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)-1구역』에 대하여 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙 임  1. 감리사 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.