보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정헌석	강동길	08/26 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 *************** 급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항으로 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	**************	D=30mm, L=6m	신설-38

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 작업지시를 하였으나, 공사현장의 자재적치로 인하여 부득이 공사연기가 필요한 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과 (시공사 : 혜솔공영)

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-38	’14.8.20. ~ 8.25	’14.8.20.~9.20

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.