문서번호	녹지관리과-7557
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
위승연		代김재희	10/14 김상국
협조

「광나루한강공원 장미터널 조성 공사 실시설계 용역」

준공기한 연기 검토 보고

한강사업본부

(녹지관리과)

「광나루한강공원 장미터널 조성 공사 실시설계 용역」

준공기한 연기 검토 보고

「광나루한강공원 장미터널 조성 공사 실시설계용역」에 대한 기간 연장 사유가 발생하여 다음과 같이 연기코자 함

□ 개요

○ 용 역 명: 광나루한강공원 장미터널 조성 공사 실시설계용역

○ 기    간: 2021. 8. 17. ~ 10. 15.

○ 내    용: 트랠리스를 활용한 장미터널 및 야외 웨딩공간 조성

○ 용 역 비: ************

○ 계약업체: **************

□ 변경내용

○ 준공기한

- 당  초: 2021. 8. 17.~ 10. 15.

- 변  경: 2021. 8. 17.~ 11. 5.

○ 연기사유

- 서울시 계약심사 및 수정사항 반영을 위한 추가 과업기간 필요하여 준공기한 연기하여 용역에 내실을 기하고자 함

○ 지체상금 부과여부: 미부과(발주처 귀책)

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 사업 시행에 만전을 기하고자 함

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.