문서번호	시설개선과-7508
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장
박희영	양정화	10/14 윤정한
협 조

『효창운동장 인조잔디 충진재 폐기물처리용역』

설  계  변  경  보  고

2021. 10.  14.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『효창운동장 인조잔디 충진재 폐기물처리용역』

설 계 변 경 보 고

우리과에서 추진중인 『효창운동장 인조잔디 충진재 폐기물처리용역』 시행 중 실제작업에 따른 계약물량 변경사항에 대하여 아래와 같이 설계변경코자 합니다.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명: 효창운동장 인조잔디 충진재 폐기물처리용역

○ 용역기간: 2021. 10. 9. ~ 2021. 10. 18.

○ 계 약 자: ㈜케이제이로지스대표 최수근

*******************

***********************

Ⅱ		설계변경 내용

○ 물량변경: ***************************************

○ 설계변경 사유: 실제작업에 따른 폐기물량 증가

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	***	***	***	****
도급비	9,346,920	12,626,020	증3,279,100

*****************************

○ 예산과목: 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장·구의야구공원 시설개보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

Ⅲ		검 토 의 견

○ 증가된 폐기물량을 설계변경에 반영하여 정산하고자 함

붙 임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.