문서번호	도시철도토목부-11340
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		허동	10/14 최병훈
협조
	주무관		노권호

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

현장 발생암 매각처리 변경계약 검토보고

2021. 10.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

현장 발생암 매각처리 변경계약 검토보고

진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 관련, 책임건설사업관리기술자로부터 발생암 매각과 관련하여 실반출량 및 계약잔량을 고려한 변경계약(매각업체간 물량 변경합의) 건이 접수되어 이에 따른 검토결과임. ※ 동명감 진접1 제2021-338호(2021. 10. 1.)

1		사업 개요

○ 공 사 명: 진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

○ 위    치: 남양주시 오남읍 양지리 ~ 진접읍 금곡리 일원

○ 규    모: 인입선 연장 5,556m, 차량기지 113m, 환기구 2개소

○ 공사기간: ‘18.12.31. ~ ‘24.10.29.(3차 : ‘21.2.22. ~ 12.31.)

○ 도 급 비: *************************

○ 시 공 사: ******

○ 감 리 사: *************

2		추진 경위

○ ‘20.2.21.: 현장 발생암 매각방안 검토 및 승인

○ ‘20.3.25.: 현장 발생암 매각계약 체결[***************)]

*************************

○ ‘20.4.14.: 현장 발생암 매각대금 처리방안 승인(본부→ 사업단)

※ 시공사의 도급액에서 해당 매각대금 정산처리

○ ‘21.8.3.: 잔여 매각량 관련 합동회의 실시(사업단, 시공사, 매각업체)

○ ‘21.10.1.: 발생암 잔여 물량 변경계약 승인 요청(사업단 → 본부)

2		건설관리사업단 보고 내용

○ 진접선(4호선 연장) 차량기지(인입선) 건설공사 발생암 매각과 관련, 실반출량 및 계약잔량을 고려하여 매각업체간 물량 변경합의에 따른 변경계약 검토

- 발생암 계약 현황

낙찰자	투찰금액	물 량	금 액(공급가액)	비고
*****	********	********	************
*****	********	********	************
***		********	**************

- 발생암 반출 현황

낙찰자	계약물량	실반출량 (‘21.8월말 기준)	잔 량	비고
*****	********	********	*******
*****	********	*******	********
***	********	********	********

○ 발생암 매각처리 변경계약 사유

- 현장 발생암 매각업체 중 ****은 계약물량이 대부분 소진된 상황이며, ****은 업체 사정으로 반출이 중단된 상황으로, 실반출량 및 계약잔량을 고려하여, 매각업체간 물량 변경 합의에 따른 변경계약 시행

※ 현장설명서(발생암 매각) 입찰조건 30항에 의거, 발생암 매각 업체는 입찰결과의 권리 양도시 발주자의 사전 서면 승인 필요

○ 발생암 계약 변경 추진(안)

구 분		당 초	변경(안)	증 감	비 고
㈜삼표 산 업	물량	220,750㎥	300,750㎥	증) 80,000㎥	**** ********
	금액	975,715천원	1,329,315천원	증) 353,600천원
흥 국 산업㈜	물량	220,749㎥	140,749㎥	감) 80,000㎥	**** ********
	금액	975,710천원	622,110천원	감) 353,600천원
합 계	물량	441,499㎥	441,499㎥	-
	**	***********	***********	-

○ 발생암 반출 변경 현황

낙 찰 자	변경계약 물량	실 반출량 (‘21.8月末기준)	잔 량	비 고 (잔량비율)
*****	300,750㎥	183,218㎥	117,532㎥	50.6%
*****	140,749㎥	26,060㎥	114,689㎥	49.4%
합 계	441,499㎥	209,278㎥	232,221㎥

○ 건설사업관리단 검토의견

- 발생암 매각 변경계약 요청 건에 대해 검토한 결과, 복수 업체로 유지하는 것이 현장운영에 매우 유리함에 따라 계약물량을 조정하여 변경계약을 시행하는 것이 적정함.

3		조치 의견

○ 발생암 매각 변경계약 요청건에 대하여 검토결과 건설사업관리단 보고내용과 같이 적정하다고 판단되므로 승인처리코자 하며, 공사진행에 지장이 없도록 관리에 철저를 기하고자 함.

붙 임) 관련 문서 1부.  끝.