문서번호	박물관과-10915
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		평창동미술문화공간조성추진반장	박물관과장
김호정		정유진	10/14 이성은
협조

서울시립 미술아카이브 디자인가구 제작·구매·설치 용역

계약기간 연장계획

2021. 10.

문화본부

(박물관과)

서울시립 미술아카이브 디자인가구 제작·구매·설치 용역

계약기간 연장계획

「서울시립 미술아카이브 디자인가구 제작·구매·설치」관련 건축 공사 지연에 따라 과업기간을 연장하고자 함.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울시립 미술아카이브 디자인가구 제작·구매·설치

○ 계약기간 : ****************************

○ 계약금액 : **************************

○ 용역업체 : ********************

□ 계약 변경

○ 계약기간 연장

구 분	당 초	변 경
계약기간	************************	************************
계약금액	************	*****

※ 귀책사유가 서울시에 있어 용역업체에 지체상금 미부과

○ 연장사유

- 서울시립 미술아카이브 건축 공사 지연에 따라 준공이 늦어지고 있어 제작 가구의 납품 일정 변경이 불가피함 이에 용역 기간을 연장하고자 함

□ 향후 계획

○ ’21. 10. 15.	: 재무과 계약변경(기간연장) 의뢰

○ ’22. 05. 31.	: 용역준공.  끝.