문서번호	토목부-16501
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
손준호		명경출	08/26 노우성
협조
	주무관		이석우

설계변경(전체2회, 2차2회) 검토보고

(마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사)

2014. 8.

도시기반시설본부

(토  목  부)

설계변경(전체2회, 2차2회) 검토 보고

(마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사)

『마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사』가 2014.3월 경찰청 규제심의가 변경 시달됨에 따라 추진한 재설계사항을 반영하고 그간 철거공사과정에서실정보고 승인사항을 반영하기 위한 설계변경 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 토목부-11043호(‘14.6.10) : 충정로 중앙차로 재설계시행 검토보고

○ 감리부-14-00069호('14.8.22) : 설계변경(전체2회 2차2회) 제출

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 아현삼거리 ～ 서대문구 충정로3가 189

○ 규    모

- 고가차도 철거 : 폭 15m, 연장 469m

- 중앙차로 설치 : 연장 1.2km, 중앙승강장 2개소

○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 9.

○ 총사업비 : 5,179백만원

○ 감리사 : (주)동해종합기술공사 외1, 시공사 : 유호산업개발(주) 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 설계변경 내용

구 분	계약금액(원)			계약기간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
전체2회	3,264,954,000	3,925,660,000	증 660,706,000	2013.06.20 ～ 2014.09.19	변경없음
2차2회	1,788,748,480	2,449,454,480	증 660,706,000	2014.04.18 ～ 2014.09.19	변경없음

○ 설계변경 사유

- 재설계 시행결과 반영 : 세부내역 별첨 참조

- 적용단가 검토 : 신규 산출단가에 낙찰율(86.968%)적용

구 분	주요변경내용	당 초	변 경	증․감	비고
버스중앙차로구간 포장변경	․도로관리과 지침시달에 따른 포장계획 변경	74,641천원	214,826천원	140,186천원
보도포장 변경	․보도블럭 -당초: 투수블럭, 559㎡ -변경: 화강석, 134㎡ 투수블럭, 643㎡	23,883천원	33,662천원	9,779천원
배수시설 변경	․빗물받이 규격변경 및 원형수로관 설치 변경	25,782천원	7,763천원	- 18,019천원
교통안전시설 변경	․경찰청 규제심의결과 반영 등	273,559천원	351,885천원	78,326천원
사급 자재비	․동상방지층, 투수블럭등 사급자재 물량증가	81,896천원	106,372천원	24,476천원
기타	․버스중앙차로 공사에 따른 지장물 이설 및 부대비용	-	62,132천원	62,132천원

- 실정보고 승인사항 반영 : 세부내역 별첨 참조

․ 아현고가 안전철거를 위한 전도방지시설 보강등 8건

○ 계약심사 대상여부 검토

구분	계약금액	설계변경 증가금액			비고
		합계	심사대상금액	심사제외금액 (실정보고사항)
금액(백만원) (비율(%))	3,265	660 (20%)	297 (9.1%)	363 (11.1%)

- 서울시계약심사업무처리규칙에 따라 심사대상금액이 10% 미만으로 계약심사 대상 아님.

- 실정보고후 공사완료된 사항은 심사제외 금액임

(※ 행안부예규 제404호제3장5절다호 설계변경심사 제외대상 사업)

Ⅳ		조 치 계 획

○ 설계변경에 대한 감리단 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되므로 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서(전체4회, 2차3회) 1부.  끝.