투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	공사기간 변경 계약의뢰(서울과학관건립공사)

우리본부에서 시행중인 『서울과학관건립공사』의 공사기간 변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 서울과학관 건립공사

나. 계 약 자 : ㈜키움건설 외 2

다. 공사기간 변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
총 차	‘14.01.13.~’16.01.12.	‘14.01.13.~’16.01.12.	변경없음
1차	`14.01.13.~`14.08.31.	`14.01.13.~`14.12.25.	증116일

라. 변경사유 : 기초파일공사 재설계 따른 공기연장

붙임 1. 공사기간 변경검토 보고서 1부

2. 공기연장 검토의견서(책임감리원) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유우린		환경시설과장	신명승		건축부장	08/26 김우성
협조자
시행	건축부-10413	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 시청별관 2동 2층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2647	/전송	02-3708-2659	/	archi-rin@seoul.go.kr	/	대시민공개