투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경기도지사(교통도로과장)
(경유)
제목	건설산업기본법 위반업체 과태료 부과 의뢰

1. 우리본부에서 시행중인「장충체육관 리모델링공사」와 관련입니다.

2. 위 현장의 도급자는「건설산업기본법 제29조제4항」규정에 따라 하도급계약을 체결하거나 변경할 경우 30일이내 발주청에 통보하여야 하나, 아래와 같이 지연통보 하였다는 감리검토의견서가 제출되어,

3.「건설산업기본법 제99조제5호」에 따른 과태료 부과 및 「같은법 제85조의3」에 따른 당해 내용의 공고조치를 의뢰하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

-  아     래 -

가. 공 사 명 : 장충체육관 리모델링공사

나. 공사위치 : 서울특별시 중구 장충동

다. 공사기간 : 2012.05.30. ~ 2014.12.31

라. 위반사항 : 하도급계약 통보의무 위반

업체명	대 표	법인번호	소재지	위반내용	비고
**** ****	***	******* *******	********** **********	- 철근콘크리트공사2차,4차,5차 308일지연 - 토목공사3차 18일지연 - 도장공사2차 250일지연 - 유리공사1차 158일지연 - 수장공사2차 51일지연	공동도급 (대표사)
******	***	******* *******	******* *********		공동도급

붙 임  감리기술검토서 각1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이광백		의료시설과장	양기정		건축부장	08/26 김우성
협조자	주무관	신현성
시행	건축부-10430	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문 37)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	nepdo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)