투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 계약변경(기간연장) 통보(장충체육관 리모델링공사)

1. JCR14-250(2014.08.20)호와 관련입니다.

2. 장충체육관 리모델링공사의 하도급 계약변경(기간연장)에 대하여 아래와 같이 통보하오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.

○ 계약변경 내용(계약기간)

하도급 공사명	하도급 업체	하도급 계약금액	계약기간		비 고
			변경전	변경후
수장공사	㈜디자인 테마	317,900,000 (변경없음)	‘13.07.18 ~ ‘14.06.02	‘13.07.18 ~ ‘14.11.30	본공사 공기연장 따른 하도급 계약기간 변경

붙 임 감리단 검토 공문 1부.  끝.

	건축부장
주무관	이광백		의료시설과장	양기정		건축부장	08/26 김우성
협조자	주무관	신현성
시행	건축부-10429	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문 37)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	nepdo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)