투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	계약변경(정산) 의뢰[2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사(긴급)]

1. 기전과-7907(2014.8.26)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진한 [2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사]에 대해

아래와 같이 설계변경(정산)을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 하반기 교통사업특별회계 교통신호기공사(긴급)

나. 공사기간 : 2013. 11. 6 ~ 2014. 8. 31

다. 계약금액 : 금133,930,000원

라. 시공업체 : ㈜경신전기 대표 김경택

마. 설계변경 내용

- 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	133,930,000	141,900,000	(증) 7,970,000	-

- 설계변경 사유 : 당초 설계와 현장조사 결과 상이한 부분에 대하여 현장여건 및                                   유관기관의 개선 요청에 따라 공사물량 증감 발생

바. 예산과목 : 1.도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를                              위한 횡단보도확충정비, 시설비(51,128,000원)

2.도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화,

도로교통소통개선, 시설비(65,130,000원)

3.자전거이용활성화및교통환경개선, 교통약자이동편의증진,

노인․장애인보호구역개선, 시설비(25,642,000원)

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 검토(감리사) 1부.

3. 설계변경내역서(정산) 1부.

4. 제비율검증대장 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	백윤광		기전과장	08/26 정윤식
협조자	주무관	박신범
시행	기전과-7911	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번2동 365-1번지 북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개