문서번호	시설보수과-3293
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	08/26 정진오
협 조

『중랑교 보수ㆍ보강공사』

공중비계 사용료 실정보고 검토

2014. 8

성동도로사업소

〔시설보수과〕

『중랑교 보수ㆍ보강공사』

공중비계 사용료 실정보고 검토

우리사업소에서 추진중인『중랑교 보수ㆍ보강공사』와 관련, 감독기관의 공중비계 사용료 실정보고 사항에 대하여 검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 개 요

공 사 명 : 중랑교 보수ㆍ보강공사

공사기간 : 2013. 05. 02 ~ 2014. 12. 31(총차)

(2차 : 2014. 03. 05 ~ 2014. 08. 30)

도 급 액 : 3,035,910,230원(2차 : 1,790,463,200원)

공사개요 : 교면포장 30a, 슬래브강결 154m, 난간철거 및 재설치 308m

신축이음교체 200m, 단면증설 2,184㎡, 교량받침 168개소 등

도 급 자 : 유성건설주식회사 대표 이영주

Ⅱ		실정보고 사항

관련근거

○ 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-13730(2014.08.21)

실정보고 내용

○ 공중비계 사용료 실 사용기간 반영(2,520㎡)    【증 3,700천원】

‧  당초 3개월 ⇒ 6개월

○ 주요공종 변경사항

공 종	규 격	단위	수 량		비고(증‧감)
			당 초	변 경
공중비계	3개월	㎡	2,520	-	감) 2,520
	6개월	㎡	1,415	3,935	증) 2,520

Ⅲ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 실정보고에 대하여 검토한 바 감독기관의 검토의견과 같이 시행함이 타당할 것으로 사료되어 본 공사에 반영하도록 조치하고,

○ 공사비 증가사항에 대하여는 추후 설계변경시 정산 반영하여, 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  실정보고(시설관리공단) 각 1부.  끝.