문서번호	시설보수과-6955
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	08/26 조병준
협 조

설계변경(정산) 검토 보고 (2013년 개봉고가차도 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

강서도로사업소

(시설보수과)

설계변경(정산) 검토 보고

(2013년 개봉고가차도 보수공사)

「2013년도 개봉고가차도 보수공사」의 감독기관인 시설관리공단으로부터 물량 증감에 따른 공사비 변경을 위한 설계변경(정산) 보고서가 접수되어 이에 따른 조치계획을 보고 드림

※ 2014.08.25. 시설관리공단 공사감독1처-7777호 “설계변경(정산) 도서 제출”

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : ‘2013년 개봉고가차도 보수공사-강서’ (계약이행보증공사)

공사개요 : 바닥판 재포장(SMAT-CON공법) 1,960㎡, 단면보수 85㎡, 공간비계 906㎡

공사기간 : 2014. 04. 28 ~ 2014. 08. 31

계 약 액 : 605,984,900원

계 약 자(보증이행업체) : ㈜삼우아이엠씨 대표 김기헌, 대경건설산업㈜ 대표 최덕순

감독기관 : 서울특별시 시설관리공단

발 주 자 : 서울특별시 강서도로사업소

	《당초계약 공사 중도타절 현황》
◎ 당초계약 개요 - 공 사 명 : 2013년 개봉고가차도 보수공사-강서 - 계 약 자 : 예도건설(주) 대표 김철권 (경기도 남양주시 지금동 135-7 박석빌딩 신관2층) - 계약물량 : 바닥판 재포장(SMAT-CON공법) 2,527㎡, 단면보수 85㎡, 공간비계 설치 1,166㎡ - 계약금액 : 752,984,900원 - 계약기간 : 2013.8.22.~2013.12.31 ◎ 공사 중도타절(2014.2.28.) : 준공기한 연기를 위한 재계약 미이행 - 기성물량 : 바닥판 재포장 567㎡, 공간비계 260㎡ - 타절금액 : 147,000,000원 (공정률 19.5%, 도급자 18백만원, 하도급자 129백만원) - 지체상금 : 35,753,109원 (지체일수 59일) - 정산금액 : (-)17,753,109원 (도급자 기성과 지체상금 상계처리 이후) → 지체상금 고지서 발부 (관리단속과, ‘14.4.7)

Ⅱ		변경내용

□ 공사비 변경

관련근거

- 시설관리공단 공사감독1처-7776(‘14.8.25) “설계변경(정산) 보고”

수량 증가 및 공종 등 추가

- 철도구간 시공계획 협의사항(한국철도공사) 이행

․ 철도운행안전원(철도신호공, 주야간) : 당초 미반영 → 변경 20일

․ 철도전기안전원(전기공사산업기사, 야간) : 당초 미반영 → 변경 18일

․ 열차감시원(보통인부, 야간) : 당초 미반영 → 변경 18일

․ 절연방호관 설치 및 해체(야간) : 당초 미반영 → 변경 240m (30m 8줄)

․ 공간비계 설치 및 해체(야간)  당초 미반영 → 변경 288㎡ (상하행 S8)

- 남부순환로 횡단구간(S3~S5), 철도구간(S8~S10, P8~P10) 추가보수

․ 표면보수(주간) : 당초 미반영 → 변경 518㎡ (상행 S3~5 + 하행 S4)

․ 표면보수(야간) : 당초 미반영 → 변경 198㎡ (상하행 S8 + 철도구간 추가보수)

․ 균열보수(야간) : 당초 미반영 → 변경 15㎡ (철도구간 추가보수)

․ 강재재도장(야간) : 당초 미반영 → 변경 12㎡ (철도구간 추가보수)

※ 주요공종 수량 증감

공 종	규 격	단위	수 량		증 · 감		비고
			당 초	변 경
노면평삭	주간	㎡	1,960	1,800	감)	160
워터젯 절삭	주간	㎡	1,896	1,736	감)	160
SMAT-CON 생산	주간	㎥	198.9	182	감)	16.9
SMAT-CON 포설	주간	㎡	1,960	1,800	감)	160
공간비계 설치	6개월사용, 주간	㎡	906	487	감)	419
공간비계 설치	6개월사용, 야간	㎡	-	288	증)	288	신규
콘크리트 표면보수	E.G프로텍터 t=0.6mm(주간)	㎡	-	518	증)	518	신규
콘크리트 표면보수	E.G프로텍터 t=0.6mm(야간)	㎡	-	198	증)	198	신규
철도운행안전원	야간	일	-	18	증)	18	신규

공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증・감		비고
총 공 사 비		605,984,900	605,000,000	감)	984,900
도급비	공급가액	550,895,364	550,000,000	감)	895,364
	부가가치세	55,089,536	55,000,000	감)	89,536
	계	605,984,900	605,000,000	감)	984,900

※ 예산과목 : (2013예산 사고이월) 도시개발특별회계, 도시안전실 도로시설과, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 개봉고가 보수공사, 시설비(401-01)

□ 공사기간 변경 : 없음

Ⅲ		검토의견

본 설계변경(정산)은 한국철도공사 협의사항 이행 및 철도구간 추가보수를 위한 수량 증감 및 공종 추가에 따른 공사비를 변경하는 것으로 감독기관인 시설관리공단의 설계변경(정산) 보고는 타당한 것으로 판단됨

Ⅳ		조치계획

상기와 같이 설계변경(정산) 시행후 도급자로 하여금 재계약토록 조치하고, 보수공사 마무리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 관련문서 각 1부.     끝.