문서번호	기전과-7913
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		08/26 정윤식
협 조
	주무관		박신범

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-1구역) 제1차 작업지시』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

2014. 8.

북부도로사업소

(기전과)

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-1구역) 제1차 작업지시』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

교통신호기 신설 및 보수공사(연간-1구역) 제1차 작업 추진중 책임감리사(영호이앤씨)로부터 현장실정에 따른 기술검토의견서가 접수되어 이를 검토하고 조치계획을 보고함

□ 관련근거

○ 2014. 7. 25. 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-1구역) 제1차 작업지시

○ 2014. 8. 18. 북부-1구역 1차 작업지시 실정보고서 제출(영호이앤씨)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-1구역)

○ 공사기간 : 2014. 04. 11 ~ 2015. 02. 28

○ 시공업체 : ㈜세진종합이엔씨 대표 이성임

○ 계약금액 : 금415,725천원

□ 제1차 작업지시 내용

○ 작업기간 : 2014. 7. 25 ~ 2014. 8. 24

○ 작업대상 : 강북구 국립4․19묘지입구 외 42건

○ 작업금액 : 금216,227천원

연번	교차로명	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
1	4.19탑 및 연동	- 교통안전표지 이설물량 설계누락 - 보도블럭 가복구비용중 재료비누락	- 누락물량 반영 - 누락물량 반영	증 1,100
2	4.19묘지앞 경보	- 교통안전표지 이설물량 설계누락 - 경보점멸기 신설 → 이설 변경필요 - 보도블럭 가복구비용중 재료비누락	- 누락물량 반영 - 추가된 물량 삭제 - 누락물량 반영	감 121
연번	교차로명	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
3	성균관대 정문 (경보)	- 교통정리요원 신설물량 설계누락 - 경보점멸기 신설 → 이설 변경필요	- 누락물량 반영 - 추가된 물량 삭제	감 1,210
4	청운초교	- 보도블럭 가복구비용중 재료비누락	- 누락물량 반영	감 17
5	미아사거리	- 보행지주 기초 신설 → 재사용 변경필요 - 보행지주(흑관) 철거물량 설계누락 - 기초재사용으로 안전점검 불필요	- 해당내역 삭감 - 누락물량 반영 - 불필요 내역 삭감	증 124
6	자하문터널 북단(보)	- 보행자 작동신호기(APS 보드설치) 설계누락	- 누락물량 반영	증 643
7	버들다리	- 잔여시간표시기 철거물량 누락	- 누락물량 반영	증 342
8	공통사항 (조가선)	- 22mm아연도강연선 및 클램프 사용이 시공의 난이함과 안전사고 우려가 있음	- 전년도까지 사용중이었던 조가선(6mm)과 애자를 사용하는 시공으로 대체	감 7
9	공통사항 (기초앙카)	○ 거푸집 설치시 합판 4회 재사용 - 서울시내 보도구간 터파기시 지장물로 인하여 통거푸집 설치가 불가하고 거푸집 4회 철거가 현장 여건상 부적절함	- 2013년도 시공방식인 거푸집 부분설치 (상부50cm) 1회용 적용	감 827
10	공사안내판 외 (안전시설물)	- 작업시 보행자 및 통행차량의 안전확보를 위하여 공사안내판, 안전휀스, 라바콘 등 안전시설물 필요	○ 작업시 안전시설물 현장설치 - 공사안내간판(대) : 2면 - 공사안내표지(소) : 2면 - 안전휀스 : 20조, 라바콘 : 30조	증 1,100
11	전기안전 점검검사비	- 전기안전점검검사비중 기본수수료 누락	- 기본수수료 내역반영 (4.19묘지앞경보, 하림각, 성균관대정문경보)	증 130
12	건강,연금, 노인요양보험 퇴직공제	- 보험료납부 증빙자료 미제출에 따른 감액 필요	- 보험료 정산 (건강, 연금, 노인, 퇴직보험료)	감 4,800
합 계			감 3,543

□ 감리사 현장실정보고 내용 및 검토의견               (단위:천원)

□ 작업지시 변경금액

구분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
공급가액	196,570,000	193,349,091	(감) 3,220,909
부가가치세	19,657,000	19,334,909	(감) 322,091
합 계	216,227,000	212,684,000	(감) 3,543,000

□ 보고자 의견

○ 책임감리사(영호이앤씨)로부터 접수된 현장실정보고에 대해 검토한 결과 현장여건에 맞게 변경하여 위와 같이 시공토록 승인하고 작업을 추진토록 하고자 함

붙 임 :  1차작업지시 감리사 현장실정보고  1부.  끝.