문서번호	시설보수과-3304
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김호규		박용선	08/26 송상영
협조

도로시설물 세척계획(4차)

2014.  08.

동부도로사업소

(시설보수과)

- 2014년 도로시설물 세척용역 -

도로시설물 세척계획(4차)

도로시설물인 터널, 지하차도에 대하여 차량통행으로 인한 매연 ․ 먼지 등에 오염된 도로시설물에 대해 주기적인 세척을 실시하여 밝고 쾌적한 도시 환경을 조성코자 함.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 2014 동부도로사업소 도로시설물 세척용역

용역기간 : 2014. 03. 31. ~ 2015. 02. 28.

도 급 액 : 140,801,000원

용역개요 : 터널 2개소, 지하차도 2개소

도 급 자 : 삼심 아이앤씨 대표 김민건

Ⅱ		보고내용

도로시설물 청결개선대책과 관련하여 동부도로사업소 관내 터널 및 지하차도   세척시행을 위한 4차 작업 계획

금회 작업지시 대상 시설물 : 터널2개소

- 직영세척

시설물명	세척내용	수 량		작업방법		작업조건		비고
				인력	기계	주간	야간
계		3,454	㎡		○	●
일원터널	타일벽체	1,976	㎡		○	●		방음벽 미설치 구간
매봉터널	타일벽체	1,478	㎡		○	●		방음벽 미설치 구간

- 용역세척

시설물명	세척내용	수 량		작업방법		작업조건		비고
				인력	기계	주간	야간
계		27,989	㎡	○			●
일원터널	천장	6,656	㎡	○			●
	타일벽체	1,976	㎡	○			●	방음벽 설치 구간
	바닥	1,456	㎡	○			●	“
	방음벽	4,368	㎡	○			●	“
매봉터널	천장	6,724	㎡	○			●	“
	타일벽체	1,479	㎡	○			●	방음벽 설치 구간
	바닥	1,250	㎡	○			●	“
	방음벽	4,080	㎡	○			●	“

Ⅲ		세척계획

연번	시설물명	통 제 계 획	통 제 시 간	관할서	비고
1	매봉터널	편도 2차로 중 1개차로 부분통제	‘14.08.28~09.05 22:00~익일06:00	수서서
2	일원터널	편도 2차로 중 1개차로 부분통제	‘14.078.28~09.05 22:00~익일06:00	수서서

세척일정

※ 우천시 일정이 변경될 수 있음.

투입인력(지하차도 기준)

내 용	소요인원(인)	비 고
고압세척기 작업	4
작업차량 및 살수차 운전	4
방음판세척	6
벽면(타일,세라믹)세척	6
벽면콘크리트세척	4
바닥(보도)세척	4
교통통제요원	2

※ 작업 공정별 투입 인원임.

투입장비

장 비 명	규 격	수량	용 도	비고
고압세척기	250 BAR	3	타일,세라믹벽체 세정작업 및 콘크리트벽체
살 수 차	18 ton	1	용수 공급
화물차량	1톤 차량	3	고압세정기,동력분무기 용수운반
조립식비계틀	1,700×900×1,200	3	벽체상단부분 작업
차량용 사인보드	1톤 차량	1	세척작업 안전과 진행차량 유도
라바콘	대	75	세척작업 안전과 진행차량 유도

Ⅳ		행정사항

교통방송, 관할 경찰서 보도자료 배포 및 협조공문 발송, 교통통제 홍보 요청.

관할 경찰서에 교통통제 사전 신고 및 교통처리계획서 제출.

작업전 안전장비 설치후 작업 시행 할수 있도록 용역업체에 작업지시.  끝.