문서번호	급수운영과-20732
결재일자	2014.8.26.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
양윤선		代권영안	08/26 안재엽
협조

설계변경 보고서(동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8. 26.

동부수도사업소

급수운영과

설계 변경 보고서

(동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약))

『동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약)』 시행중 신규단가 및 시공물량 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약)

○ 공사규모 : D=13~300㎜, L=2,081m

○ 공사기간 : 2014.05.30. ~ 2014.08.12.

○ 도 급 자 : ***************

○ 도 급 비 : ************

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 신규공종 및 시공물량 증･감 발생

- 신규공종 및 신규자재 발생

․ 신규공종 : 콘크리트 포장절단(야간) 외 37개 공종

․ 신규자재 : 새들,주철관용(슬립) 250/25 외 9개

- 시공물량 증･감 현황

․ 토공,부설공,포장공,부대공 : 아스팔트 포장절단 외 109개 공종

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
공급가액	***********	***********	변경없음
부가가치세	**********	**********
도 급 비	653,784,050	653,784,050

4				보고자 의견

○ 위와 같은 실정으로 설계변경 사항에 대하여 타당성 여부 등을 검토 및 심의하여 설계변경에 반영하고자 우리사업소 설계변경 심사위원회 개최 후 그 결과에 의거 설계변경을 시행하고자 합니다.

따로붙임 : 설계변경서 1부.  끝.