투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청

1. 시설보수과 – 6185(2014.8.26.)호 준공기한 연기 검토보고(소장방침)와 관련입니다

2. 우리사업소에서 시행하고 있는 『창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역』의 준공기한을 아래와 같이 연기코자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사 기본 및 실시

설계용역

나. 계약상대자 : ㈜서우티이씨 대표 강대신, 성우이엠이 대표 조정환

다. 계약금액 : 41,176천원

라. 준공기한 연기

- 당  초 : 2014. 3. 19  ∼ 8. 31

- 변  경 : 2014. 3. 19  ∼ 9. 30(30일간)

마. 연기사유

- 엘리베이터 설치지점 관련 유관기관 협의(이마트 토지사용 승인) 지연

- 서울시 엘리베이터 디자인 재 심의에 일정 소요기간 필요

바. 귀책사유 : 서울특별시

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기 검토 보고서 1부.끝.

	시설보수과장
★주무관	김영원		시설보수과장	08/26 정재현
협조자
시행	시설보수과-6187	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동(보건소길 2 ) 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5451	/전송	02-945-5073	/	ywk2601@seoul.go.kr	/	대시민공개