문서번호	교량보수과-2648
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김형섭		김종대	08/26 정진오
협조

설계변경(정산) 검토 보고

(동호대교 기초구조물 보수공사 실시설계용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  8

성동도로사업소

(교량보수과)

설계변경(정산) 검토 보고

- 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사 실시설계 용역-

우리사업소에서 시행중인 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사 실시설계 용역에 대하여 설계변경(정산) 시행에 대한 검토 보고임

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사 실시설계 용역

○ 공사기간 : 2014. 4. 2 ~ 2014. 9. 1

○ 도급금액 : 122,478,400원

○ 용역개요 : 실시설계용역 1식(수중우물통 53기)

○ 도 급 자 : (주)천일 대표이사 김석환

Ⅱ		설계변경 검토

○ 설계자문비 및 우물통 현장조사비용 정산에 따른 감액

- 설계자문비 : 당초 15인 → 7인(-800천원)

- 우물통 현장조사에 따른 바지선(예,대선) 비용 중 미사용한 비용 감액(-3,244천원)

○ 설계변경 내역

- 도급비 변경 현황                                     (단위:원)

구 분		금 액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총 공사비		122,478,400	118,038,800	-4,439,600
도급액	공급가액	111,344,000	107,308,000	-4,036,000
	부 가 세	11,134,400	10,730,800	-403,600
	계	122,478,400	118,038,800	-4,439,600

Ⅲ		조치계획

○ 용역 수행중 필요한 추가비용 반영한 사항으로 설계 자문비 및 현장 조사비용(바지선)에 대하여 실제 소요 비용을 반영하여  설계변경 시행하고자 함.

첨부  설계변경 내역서 1부.  끝