다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	"수도권 고속철도 제1-1공구 노반신설 기타공사" 도로점용공사장 교통소통대책 공사기간 연장 승인 요청 회신

1. 수도권본부 건설총괄처-14235(2014.8.20)호 와 관련하여, “수도권 고속철도 제1-1공구 노반신설 기타공사” 교통소통대책 기간 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 기간 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 교통소통대책 변경

구분	변경사항		사유
	당초	변경
수도권 고속철도 제1-1공구 노반신설 기타공사	2013년 06월 01일 ∼ 2014년 08월 31일	2013년 06월 01일 ∼ 2015년 12월 20일	- KTX 수서역 환승연결통로 구조물 계획변경에 따른 공사기간이 연장

나. 교통소통대책 변경 조건

- 단계별 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치 강화

- 공사 완료후 통보

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사담당실로 통보 조치합니다.

.끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박평근		신호운영팀장	고광섭		교통운영과장	08/26 강진동
협조자	★주무관	이병택
시행	교통운영과-15976	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15번지 서울시청 별관 1동 6층 교통운영과	/
전화	2133-2460	/전송	2133-1053	/	ppark@seoul.go.kr	/	대시민공개