함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	작업기간 연기요청에 대한 회신

1. 상수도공사관리처-14025('14.8.25)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 시설물보수 작업지시(시설물보수-5~9)에 대한 작업기간

연기요청 사항을 아래와 같이 승인.회신하오니 감독업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 대상 및 현황

지시번호	위치	작업기간(당초)	지시내용	연기사유	연기요청일	비고
시보-5	암사동 458-3	2014.8.07~8.26	밸브교체	단수지역내 민원 및 잦은 우천으로 공사기간 부족	2014.8.07~ 9.02	공단요청사항 승인
시보-6	암사동 458-13		밸브교체
시보-7	암사동 461-9		철개교체
시보-8	암사동 474-8		철개교체
시보-9	암사동 496-40		밸브교체

끝.

							강동수도사업소장
주무관							황대룡			주무관					송종범					시설관리과장					전결 08/26 代송종범
협조자
시행			시설관리과-13217									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		3146-5208						/전송								/	daeryong@seoul.go.kr												/	대시민공개