함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	물품변경계약체결통보[강북정수장 고도정수처리시설 CCTV 제작구매]

1. 생산부 기전설비과-5539(2014.08.19)호와 관련입니다.

2. 『강북정수장 고도정수처리시설 CCTV 제작구매』에 대한 변경계약을 별첨과 같이 계약체결하고 안내드리니 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 계약자 : ***************

나. 계약금액 (변동없음)

● 금153,776,500원

다. 계약기간

당 초	변 경	비 고
’14.07.14∼’14.09.02	’14.07.14∼’14.10.05	33일 증

라. 물품기한 연기사유

- 선행공정 외곽울타리 시공일정과 CCTV설치 및 이설기간을 고려 계약금액 조정없이 연기하고자 함.

붙임 : 1. 물품변경계약서(승인통보) 1부.

2. 계약보증서 및 합의서 각 1부.  끝.

	재무회계과장
★주무관	박은미		재무회계과장	08/26 代한희균
협조자
시행	재무회계과-11094	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동27-1)	/
전화	02-3146-1232	/전송	02-3146-1209	/	shsarang@seoul.go.kr	/	부분공개(7)