	서울특별시도시기반시설본부
수신자	삼성물산(주) 대표이사
(경유)
제 목	석촌지하차도 주변 도로함몰 등 발생 및 복구관련 요청

1. 도시철도토목부-9135호(‘14.8.21)와 관련하여 추가 요청사항입니다.

2. 귀사는 ‘서울지하철9호선 3단계 919공구’ 시공사로서 석촌지하차도 하부를 통과하는 구간에 지하차도 구조물 안전성을 확보할 수 있는 대책을 마련하여 설계 시공하여야 하고, 공사로 인한 주변 침하, 균열발생 등의 피해에 대한 보상 및 복구 책임을 부담하고 있습니다.

3. 그런데 지난 2014년 8월 14일 석촌지하차도 도로함몰 원인조사 중간발표에 대한 전문가 조사단의 발표에 의하면 도로함몰은 지하철 굴착공사로 인한 것으로 추정되고 있고, 쉴드터널 배토량 및 막장에 대한 관리에 대한 문제점들이 지적되고 있으므로 공사로 인한 주변 침하, 공동 및 균열발생 등의 문제에 대하여 귀사는 귀사의 책임과 비용으로 복구를 완료하여야 합니다.

4. 또한 지하차도 전면 교통통제로 인하여 주변 지역에도 상당한 불편과 피해가 가중되고 있으므로, 귀사에서는 복구비용에 대한 의사표시 동시에 복구대책을 추진하여 이러한 피해가 가중되지 않도록 조속히 조치하시기 바랍니다.

첨부 : 기 송부한 도시철도토목부-9135호(‘14.8.21) 사본 1부.    끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조태현		궤도과장	代윤방식		도시철도토목부장	전결 08/26 이은상
협조자	주무관	윤원섭		법률전문관	조미숙
시행	도시철도토목부-9358	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 4층	/
전화	02)772-7245	/전송	02)772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	대시민공개