투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(송정,사근 빗물펌프장 증설공사)

1. 우리 본부에서 시행중인 「송정,사근 빗물펌프장 증설공사」에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 송정, 사근 빗물펌프장 증설공사

나. 공사규모 : 송정 펌프증설 Q=616톤(2대), 사근 펌프증설 Q=1,020톤(2대)

다. 도 급 비 : 7,219백만원 (2차 4,630백만원)

라. 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 10. 31

마. 도 급 자 : 경동산업(주)외 1

바. 설계변경 사유 : 시공물량 증․감 발생 등

사. 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책사업, 사근빗물펌프장시설용량증대, 시설비및부대비, 시설비

아. 설계변경 내역

【공사비 변경 (전체 3회)】

4                                    (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공사비		7,219,729,000	7,476,714,300	증) 256,985,300
도급비	공급가액	6,563,390,000	6,797,013,000	증) 233,623,000
	부가가치세	656,339,000	679,701,300	증) 23,362,300
	합 계	7,219,729,000	7,476,714,300	증) 256,985,300

【공사비 변경 (제2차 4회)】

(단: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공사비		4,630,781,500	4,887,766,800	증) 256,985,300
도급비	공급가액	4,209,801,364	4,443,424,364	증) 233,623,000
	부가가치세	420,980,136	444,342,436	증) 23,362,300
	합 계	4,630,781,500	4,887,766,800	증) 256,985,300

자. 소요예산 조치 : 금회 설계변경에 따른 도급비 증액분(금256,985천원)은 2014년 당해연도 예산으로 집행

붙임  1. 설계변경 시행방침 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임병길		방재시설과장	서관석		방재시설부장	08/27 代서관석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-8161	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/
전화	3708-8762	/전송	3708-8756	/	bglim@seoul.go.kr	/	대시민공개