투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(2013년 개봉고가차도 보수공사)

우리 사업소에서 시행중인 『2013년 개봉고가차도 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : ‘2013년 개봉고가차도 보수공사-강서’ (계약이행보증공사)

나. 공사개요 : 재포장(SMART-CON공법) 1,960㎡, 단면보수 85㎡, 공간비계 906㎡

다. 공사기간 : 2014. 04. 28 ~ 2014. 08. 31

라. 계 약 액 : 605,984,900원

마. 계 약 자 : ㈜삼우아이엠씨 대표 김기헌, 대경건설산업(주) 대표 최덕순

바. 변경사항

○ 공사비 변경

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증・감		비고
총 공 사 비		605,984,900	605,000,000	감)	984,900
도급비	공급가액	550,895,364	550,000,000	감)	895,364
	부가가치세	55,089,536	55,000,000	감)	89,536
	계	605,984,900	605,000,000	감)	984,900

※ 변경사유 : 공사수량 증감 및 신규공종 추가 등에 따른 공사비 감소

○ 공사기간 변경 : 없음

아. 예산과목 : (2013예산 사고이월, 도로시설과) 도시개발특별회계, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 개봉고가 보수공사, 시설비(401-01)

붙  임 : 1. 관련 보고서(방침)

2. 변경설계내역서(정산).  끝.

주무관	류춘광		시설보수과장	김권일		강서도로사업소장	08/27 조병준
협조자	주무관	윤신식
시행	시설보수과-6975	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1) 강서도로사업소 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/	rckng@seoul.go.kr	/	대시민공개