함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 및 재계약의뢰(유수율 저조블록 원인규명 용역)

1. 우리사업소에서 시행중인 『유수율 저조블록 원인규명 용역』에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기코자 재계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 유수율 저조블록 원인 규명용역

나. 도 급 자 : ************

다. 계약금액 : ***********

라. 준공기한 연기

- 당 초 : 2014. 03. 31 ~ 2014. 09. 30

- 변 경 : 2014. 03. 31 ~ 2014. 10. 31

마. 귀책소재 : 중부수도사업소

바. 지체상급 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 유수율 저조 중블록 원인 규명 추가공정 반영 및 성과품

질을 높이기 위해 본 용역의 절대공기 부족

첨  부 : 1. 준공기한 연기 내부방침 1부

2. 합의서 1부    끝.

	시설관리과장
주무관	이해승		주무관	은정호		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	08/27 나태산
협조자
시행	시설관리과-23019	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2192	/전송		/	skyvvv9611@seoul.go.kr	/	부분공개(3)