문서번호	방재시설부-8211
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	08/27 代서관석
협조

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

실정보고(유지관리부서 요구사항 반영) 검토

2014. 8.

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

실정보고(유지관리부서 요구사항 반영) 검토

(용허리공원 빗물저류조 설치공사)

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」중 유지관리 부서인 서초구청 요구사항인 저류조내 계단, 스크린망, 매쉬 휀스 설치 등을 반영코자 실정보고에 대한 검토 보고임.

[근거:잠원2감 2014-222호(′14.8.27)]

□ 공사개요

◦ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 용허리공원 일대

◦ 규    모 : 빗물저류조 V=15,000㎥, L=237.8m(2.0×1.5@1)

◦ 공사기간 : '12.12.21 ~ '14. 9.30

◦ 총사업비 : 11,000백만원

□ 실정보고내용

◦ 실정보고 사유

- 인수인계를 위한 서초구청(안전치수과) 합동점검 결과 보완사항 요구

〔안전치수과-6894(2014.4.1.), 안전치수과-15245(2014.7.3.)〕

- 요구사항 협의

․2014. 6. 26 : 서초구청 안전치수과 등 업무관련자(감리단장 외 13명)

․2014. 8. 25 : 보완요청사항(세부내용) 통보(서초구청→도기본)

◦ 적용 단가 : 견적가에 대한 협의율(92.748%) 적용

◦ 추가소요 예산 : 약 136,760천원 증액

- 추가공사비 현황(136,760천원)

․기계실 인양구 덮개 설치(FRP 2.0×1.4@4, 2.0×1.0@1) 증)13,369천원

․기계실 출입문 설치(W=1.65 L=3.57) 증11,875천원

․집수정 주변 스크린망 설치(A=234㎡) 증63,187천원

․저류조 진입 계단 설치(L=18.9m) 증46,060천원

․저류조 주변 메쉬휀스 설치(H=2.0m, L=24m) 증2,269천원

◦ 감리단 검토의견

- 저류조 내 계단, 난간, 스크린망, 펌프실 인양구덮개, 안전휀스 설치 등은        저류조 유지관리를 위한 안전시설물로 유지관리 부서인 서초구청 요구사항        수용은 타당하다고 사료됨.

□  조치의견

◦ 감리단 실정보고 내용과 같이 저류조내 계단 설치 등 서초구청 요구사항 반영은       타당한 것으로 판단되며,

◦ 계약심사과 ‘계약심사’ 결과를 반영하여 설계변경 시 반영코자 함.

붙임 : 1. 감리실정보고서 1부.

2. 협의결과 각1부.   끝.