투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약(총차3회, 2차2회)의뢰

1. 우리본부에서 시행중인 「공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경계약(총차3회, 2차2회)의뢰하오니 조치하여 주시기   바랍니다.

가. 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

나. 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30

다. 도 급 비 : 5,365백만원(2차 1,747백만원)

라. 도 급 자 : ㈜승영기술공사 대표 김성찬

마. 예산과목

- 치수및하천관리, 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

- 치수및하천관리, 수방대책사업, 면목4빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

바. 설계변경사유 : 총차물량 증,감 및 2차 계약내역 조정

사. 설계변경 내역

1) 총차 3회

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		11,691,500,000	11,691,500,000	-
도급비	공 급 가 액	4,877,880,000	4,801,122,727	감) 76,757,273
	부가가치세	487,788,000	480,112,273	감) 7,675,727
	소 계	5,365,668,000	5,281,235,000	감) 84,433,000
관 급 자 재 비		842,245,200	842,245,200
이 전 비		5,483,586,800	5,568,019,800	증) 84,433,000

1) 2차 2회

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		2,533,000,000	2,533,000,000	-	물량 및 공종변경으로 공사비 증감사항 없음
도급비	공 급 가 액	1,588,254,546	1,588,254,546
	부가가치세	158,825,454	158,825,454
	소 계	1,747,080,000	1,747,080,000
관 급 자 재 비		652,899,000	652,899,000
이 전 비		153,021,000	153,021,000

따로붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차 3회, 2차2회) 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	서관석		방재시설부장	08/27 代서관석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-8213	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개