문서번호	시설보수과-7024
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
전재형	김권일	08/27 조병준

공사 실정보고(5차 작업관련)

(2014 관내 도로시설물 일상유지보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  8

강서도로사업소

시설보수과

공사실정보고(‘14년 관내 도로시설물 일상유지보수공사)

1. 공사개요

- 공 사 명 : 2014년 관내 도로시설물 일상유지보수공사

- 공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2. 28

- 도급업체 :종정종합건설(주) 대표 방은혜

2. 작업지시 현황 (5차-4) : 2014. 6.18 ~ 9.15

위 치	손상내용	길이 및 연장	면적	공종
염창IC 하부복개 구조물	포장부 파손 (올림픽대로 진입방향)	4.5m×205m	922.5㎡	절삭후 아스팔트 덧씌우기(t=5cm)
		포장물량의 5%	46㎡	상판보수공 (T=30㎜, 레코MMA)
		4.5m×205m	922.5㎡	교면방수(GUSS)
			205m	유공관설치
			205m	주입줄눈설치
	신축이음장치 균열,누수 (J1, J4)	4.5m×2개소	9m	신축이음장치교체 (NEW M/C #50)

3. 실정보고내용

1) 당초 보수 설계시 t=5cm로 복개 전구간 아스콘포장 절삭후 포장코자

하였으나, 기 포장 보수된 A1~J1구간을 제외하고 기존 포장면 절삭        현장을 실측한바, 포장 두께가 t=6cm ~ 9cm로 평균 6.5cm로 조사

되었으며, 복개구조물과 연장되는 토공구간도 포장상태가 불량하여        추가 보수실시로 당초 교면방수 물량감소 및 아스콘 및 공사물량

증감사항이 발생되어 실정보고함

2) 또한, 포장면 절삭후 교면방수 시행전 일부구간 상판 열화 및 부식        등으로 철근이 노출되어 실측한 바,당초 예상 설계 t=30mm보다 깊은

t=50mm이상 손상된 것으로 확인되어 실정보고함

3) 신축이음장치는 당초 J1, J4구간 교체키로 하였으나, J6, A2구간

단차 발생 및 후타재 열화가 심각하여 변경코자 실정보고함

4. 현장 사진

포장면 실측 6cm                   7cm                     9cm

상판보수 구간 J1                  J3                           J5

A2구간 신축이음 단차 및 후타재열화        J6구간 신축이음 단차 및 후타재열화

신축이음교체(변경)

교면방수제외구간

(토공구간)

포장제외

5. 조치계획

- 위와 같은 사유로 포장물량증가에 따른관급자재(아스콘)물량 증감조치     하고자 하며, 교면방수,상판보수공 규격 및 물량변경에 대하여

설계변경조치코자 함.

1) 아스콘 포장 당초) 설계(T=5cm) 922.5㎡ 아스콘량 : 110톤

⇒ 변경)아스콘 포장(T=6.5cm) 995.4㎡  아스콘량 : 150톤

2) 교면방수포장 당초) 922.5㎡ ⇒ 변경) 604.9㎡(감 317.6㎡)

3) 상판보수공(MMA): 당초)T=30mm 46㎡ ⇒ 변경)T=50mm 37.2㎡

소요금액 :  감액 10,000천원 . 끝.