문서번호	기전과-6897
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이귀섭		김대진	08/28 송상영
협조

『2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

공 사  기 성  보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

동부도로사업소

(기전과)

『2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

공 사  기 성  보 고

『2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 제 1회 공사기성을 보고 함.

공사개요

공 사 명 : 2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

공사개요 : 송파구, 강동구 교통신호기 유지보수 1식

공사기간 : 2014. 03. 21 ~ 2015. 02. 28.

계 약 자 : 주요이앤씨(주)  대표 박 영권

계약금액 : 금463,991,000원

관련근거

책임감리사 (주)건원영이앤씨 기성서류 제출 (건원14-08-09, 2014.08.26)

기성현황

○ 전회기성금액 : -

○ 금회기성금액 : 금275,220,000원(금이억칠천오백이십이만원정)

○ 누계기성금액 : 금275,220,000원(금이억칠천오백이십이만원정)

○ 누계율(%)   : 59.3%

○ 기성청구일 : 2014. 8. 21

○ 기성검사일 : 2014. 8. 25

○ 기성 주요내역

- 2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사 작업지시 1차 ~ 4차            · 제어기 8대 교체, 1대 이설

· 신호등 11조 신설, 47조 이설, 25조 철거

· 신호등주 8본 신설, 7본 이설, 6본 철거

· 잔여시간표시기 21개 신설, 4개 이설, 4개 철거

· 음향신호기 90대 신설,  7대 이설, 66대 철거

· 케이블 2,438m 신설, 871m이설, 2,144m 철거

· 기타시설 1식

기성금액

계약금액	전회기성금액	금회기성금액	누계기성금액	잔 액
463,991,000	-	275,220,000	275,220,000	188,771,000

조치의견 : 상기공사에 대하여  기성부분을 처리코자 함.

대 완 료 일 :

관련대호 : 기전과0

관련대호 : 기전과0

붙임 : 1. 감리단 기성서류 제출공문 사본(기성검사조서 포함) 1부.

2. 기성내역서 1부.

3. 기성사진 1부. 끝.