함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사 1차 기성금 지출 협조

1. 시설관리공단 공사감독2처-14138(2014.08.26.)호 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『화곡본동 24-268 ~971-1번지 외 2개소 세척갱생관 정비공사』관련 1차 기성금에 대하여 아래와 같이 기성검사조서 등 관련서류를 제출하니, 추석절 이전에 기성금액이 지출될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 화곡본동 24-268 ~971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사

2) 규    모 : D15 ~ D200㎜, L=1,264m

3) 기    간 : 2014. 4. 04.~ 2014.12.09.

4) 총공사비 :783,689,000원

(단위, 원)

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타
789,689,000	361,928,620	130,698,000	291,062,380

5) 시 공 사 : 용은씨엔씨 대표 윤석

6) 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 서홍석

7) 공 정 률 : 53% (D15~200㎜, L=693m)

나. 기성검사조서(1차) 내용

1) 기성금액 : 금122,430,000(금일억이천이백사십삼만원)

※ 기성률 : 33.83%(122,430,000 / 361,928,620원)

2) 기성검사일 : 2014.08.26일

붙임 : 공문 및 기성검사조서 등 관련서류 8부.  끝.

	시설관리과장
주무관	곽진선		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	08/28 이자원
협조자
시행	시설관리과-18088	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4009	/전송	02-3146-4039	/		/	대시민공개