문서번호	환경과-6155
결재일자	2014.8.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경과장	운영부장
윤석경		代윤석경	08/28 조원준
협조	뚝섬안내센터장		代김태성
	수상관리과장		나원호

뚝섬한신나들목입구 이동식 화장실 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

한강사업본부

환경과

뚝섬한신나들목입구 이동식 화장실 설치

뚝섬한강공원 한신나들목 입구에 설치되어 있는 재래식 화장실을 수세식화장실로 변경 설치하여 이용객 만족도 향상을 증진코자 함

□ 주변 현황

❍ 주변여건 : 한신아파트 등 성동구 주민이 한강산책을 위한 접근이 용이하여 아침, 저녁 이용객이 많은 지역임

❍ 화장실현황 : 분류하수관이 없어 재래식화장실 1동 설치

❍ 민원사항

- 악취가 심한 재래식 화장실을 수세식화장실로 교체해 달라는 민원이 수차에 제기됨

- 지역 시의원(이상묵) 수세식화장실 설치 민원제기

사진 1 한신나들목 입구 재래식화장실 설치

□ 검 토

❍ 한신나들목 옆 성동지대 하부 수세식화장실 설치

- 오수처리 : 성동지대 오수 집수정 유입가능

- 상수도, 전기시설 : 성동지대 인유입배관에서 분기가능

□ 이동식 화장실 설치

❍ 위    치 : 뚝섬한강공원 성동지대 하부

❍ 기    간 : 2014. 9. 11~ 10. 10

❍ 유    형 : 이동식 화장실 1동

❍ 내    용

- 소형 이동화장실 제작 : 변기2(남1, 여1)

- 상수도・전기 : 성동지대 분기사용

- 오수처리 : 성동지대 오수집수정 유입

- 화장실 안내표지판 5개소 설치

- 기존 재래식화장실 철거(폐쇄)

❍ 소요예산 : 12백만원

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 둔치및화장실청소, 시설비(100-401-01)

- 계약방법 : 수의계약(소액으로 주변 매설상태를 인지한 업체와

수의계약추진)

□ 행정사항

❍ 화장실 설치후 유지관리(뚝섬안내센터)

설치위치

화장실설치예정지역

(성동지대하부)