투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	시설공사 시행 및 계약의뢰(전체11회, 5차3회)-동부3공구

우리본부에서 시행중인 『동부간선도로확장공사(3공구)』에 대하여 아래와 같이 계약금액을 조정하고자 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

나. 도 급 비 : 55,936백만원

다. 공사기간

- 전 체 : 2008.02.15. ~ 2015.12.31.

- 5  차 : 2013.01.30. ~ 2014.12.31.

라. 도 급 자 : ㈜세원건설외 1개사

마. 예산과목 :

- 교통사업특별회계, 도로건설, 광역도로건설, 동부간선도로확장(녹천교~의정부시계), 교통개선분담금, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)

바. 설계변경 내역

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증․감
전체 (11회)	도급비	55,870,496,000	56,433,267,000	증)562,771,000
	공사기간	‘08. 2. 15 ~ ‘15. 12. 31	‘08. 2. 15 ~ ‘15. 12. 31	변경없음
5차 (3회)	도급비	10,000,000,000	10,000,000,000	변경없음	물량변경
	공사기간	‘13. 01. 30 ~ ‘14. 12. 31	‘13. 01. 30~ ‘14. 12. 31	변경없음

붙임 : 1). 설계변경 방침서 1부.

2). 설계변경 내역서(전체11회, 5차3회) 1부.  끝.

	토목부장
주무관	장종환		교량건설과장	이동훈		토목부장	08/28 노우성
협조자
시행	토목부-16714	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 50	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	3708-2599	/	hjj0128@seoul.go.kr	/	대시민공개