문서번호	시설보수과-6259
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		정재현	08/28 이승진
협조

실정보고사항 검토결과 보고

화랑고가 성능개선공사

2014. 8

북부도로사업소

시설보수과

실정보고사항 검토결과 보고

화랑고가 성능개선공사

우리사업소에서 시행하고 있는 화랑고가 성능개선공사에 대한 감독

기관으로부터 설계변경(정산) 보고한 사항에 대한 검토 보고 임.

공 사 현 황

◯ 공 사 명 : 화랑고가 성능개선공사

◯ 공사기간 : 2013년 5월 8일 ~ 2014년 8월 31일

◯ 도 급 액 : 837,529,000원

◯ 공사개요 : 교량받침설치 - 68개소, 연단보강 - 14개소(P1~P3, P6~P9)

◯ 도 급 자 : 현근이엔씨(주) 대표 김명균

공단보고 내용

가. 물량증,감 반영

1) 교량점검로 예산 범위 내 시공

◯ 신규 점검로 설치대상 5개소(P2,P3,P6,P7,P8)중 예산 범위 내 설치

2) P4, P5(철도구간) 당초 야간에서 주간으로 변경시공.

나. 변경 내용

1) 물량 증,감 사항

구 분	규 격	단위	수 량		비 고(증.감)
			당 초	변 경
기존교량받침철거		개소	58	68	증) 10
교량받침철거(야간작업)		개소	10	-	감) 10
교량점검로 재설치		m	25	127.3	증) 102.3
철도수탁 공사비		식	-	1	증) 1

구 분		당 초	변 경	증,감
총공사비		867,529,000	864,578,000	감)	2,951,000
도급비	공급가액	761,390,000	785,980,000	증)	24,590,000
	부가가치세	76,139,000	78,598,000	증)	2,459,000
	계	837,529,000	864,578,000	증)	27,049,000
이 전 비		30,000,000	-	감)	30,000,000

2) 공사비 변경 사항                                           (단위:원)

검토결과

기 실정보고 완료한 사항에 대한 물량 및 공사비 증,감 사항으로 감독기관인 시설관리공단에서 검토 보고한 변경 내용과같이 설계변경 시행

조치사항

- 공단 의견과같이 최종 설계변경(정산)시행

- 준공기한내 미비한 사항 마무리 후 준공시행토록 통보

붙 임 :  설계변경(3회정산) 도서 1부. 끝.