문서번호	토목부-20965
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	11/15 임춘근
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

Ramp-E 구간 공용개시 및 합동점검 계획보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

Ramp-E 구간 합동점검 및 공용개시 계획보고

본 공사 공정계획에 따른 하남방향 가시설 철거를 위해 차로를 확보하고자  부득이 Ramp-E 구간 합동점검 및 공용개시 계획이 있어 보고드림

1		근 거

○ Ramp-E 공용개시에 따른 합동점검 요청

[감리단 올대감 21-308호(2021.11.9.)

2		사업개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사규모

- 램프신설 : L=1,600m(교량2개소, L=446m)

- 램프이설 : L=1,309m(교량1개소, L=139m)

○ 사업기간 : 2016.04.22 ~ 2022.12.31.(전체), 2021.07.06 ~ 2021.12.31(6차)

○ 총사업비 : (전체) 56,399백만원(‘21년 : 8,706백만원)

○ 공 정 율 : 79.8%

3		검토내용

□ 공용개시 사유 및 교통처리 계획

◦ 공용개시 사유 : 하남방향(중앙부) 가시설철거를 위한 차선확보

◦ 공용개시 위치 : ***********************************

************

공용개시 위치

Ramp-E 구간

◦ 공용개시 사유(작업순서)

① R-E 구간 개통(R-J2교, R-E교 공용개시) → ② 하남방향 및 김포방향 차로변경(각1개차로) → ③ 하남 가시설철거, R-J(임시 R-E 차로부) 작업 → ④김포방향 중앙부 측구 및 배수공 시공

◦ 교통처리계획

**********

A

A‘

*****************

****************

◦ 가시설 철거위치(구간)

- ********************************************

- ********************************************

◦ 공용개시 Ramp-E 시설물 집계

**		**	**	**	**	**
****	*******	****** ******** **********	*	***	*******************	******
	********	****** *****************************	*	**	*******************	******
	**	****** ***************	*	**	*******************	******
	**	********** *******************	*	**	*******************	******
***	****	***********	**	*****	*************** *******	******
*******	****	****	**	**	****************** ****************** ******************	******
	***	***	**	***	***************	******
	******	*********	**	*	************	******
***	******	********	**	*	************	******
		****	*	***	***************	******

4		공용개시 합동점검 개요

○ 안  건 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 Ramp-E 구간 공용개시에 따른 합동점검

○ 점검요청 기관 : 도로시설과, 서울시설공단, 경찰청 교통과

○ ****************************************

※ 관계기관 일정에 맞춰 점검 실시

○ 참석자 : 공사관리관, 감리단, 시공사, 도로시설과, 서울시설공단, 경찰청 교통과

○ *****************************

5		감리단 검토의견

○ ************************************************************************************************

6		조치계획

○ *********************************************************************************************

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.