기  성  보  고  서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김재엽	최양주	08/28 이자원

명에 의하여 ‘2014년 방화1동외 10개동 상수도공사(장기계속)’와 관련, 기성금 신청(1차) 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 08. 28.

보고자 :  지방시설주사보   김 재 엽

강서수도사업소장 귀하

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 방화1동외 10개동 상수도공사(장기계속공사)

나. 착 공 일 : 2014.07.01

다. 준공기한 : 2015.06.30

라. 도 급 액 : 463,865,500원

마. 도 급 자 : (주)삼오진건설  대표 : 김봉중

2. 기성금 신청현황

가. 위    치 : 강서구 가양동 30-1호외 52건

나. 금회공사기간 : 2014.07.01 ~ 2014.08.20(51일간)

다. 기성 금액 : 103,510,000원

라. 예산 과목

(단위: 원)

구 분	정산금액	구분 확인제 지출액(기 지출액)	금회(정산)지출액	비고
합 계	103,510,000	13,222,000	90,288,000
급수공사,신설공사비 (급수공사)	84,700,000	13,222,000	71,478,000	노무비 (‘14.8.20)
배급수비,수선교체비,기타교체비 (불용관정비)	2,090,000	-	2,090,000
구축물,시설비 및 부대비,시설비 (송배수관정비)	16,720,000	-	16,720,000

3. 기성 내역

가. 기성내역

(단위: 원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	기성 합계	잔 액
도 급 액	463,865,500	-	103,510,000 (22.3%)	103,510,000 (22.3%)	360,355,500 (77.7%)

나. 공사개요

(단위:개소)

계	신 설	개 량	송배수관	비 고
53	43	9	1

다. 세부내역

(단위:m)

구 분	계	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	비고
합 계	252	-	109	22	56	44	6	7	-	3	-	-	5
신 설	245	-	109	22	56	44	6	7	-	1	-	-	-
개 량	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송배수관	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5

4. 처리 의견

○ 상기와 같이 2014년 방화1동외 10개동 상수도공사 기성(1차)을 시행코자 합니다.

붙임 : 1. 기성내역서(1차) 1부.

2. 구분확인제 지출현황 1부.  끝.