투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	공사변경계약체결 통보(행복플러스 작업장건립 기계설비공사)

1. 설비부-9506(2014.08.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 공사계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약체결하였음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 행복플러스 작업장건립 기계설비공사

나. 변경계약체결 현황

구 분	당 초	변경	비 고
계 약 자	㈜선진이앤에스 **** ***)	변경없음
계약금액	292,624,000원	변경없음
공사기간	2013.08.12.~ 2014.08.31	2013.08.12.~ 2014.10.31

붙 임 : 1. 공사변경계약체결통보서 1부.

2. 계약보증서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	이상일		경리과장	최영미		건설총괄부장	08/28 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-15752	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2372	/전송	02-3708-2365	/	bestman@seoul.go.kr	/	부분공개(6)