문서번호	도로보수과-7588
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최진규	이석재	08/28 이승진

설계변경 시행계획(제2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

「2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사」

설계변경 시행계획(제2회)

「2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사」 시행중 보수물량 증가에 따른 변경사항이 있어 아래와 같이 검토하여 설계변경 시행코자 함

1. 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 화강석포장 보수 400㎡ 등

○ 공 사 비 : 300,000,000원

- 도급비 225,500,000원, 관급비 64,500,000원, 이전비 10,000,000원

○ 공사기간 : 2014.5.15.~2015.2.28

○ 도 급 자 : ㈜사림엔지니어링 대표 이영걸

2. 설계변경 사유

○ 돌포장 정비물량 증가분 반영에 따른 추가예산 배정(320백만원) ※ 총720백만원

⇒ 세종로(광화문광장) 유지관리 검토보고 통보(도로관리과-11958, ‘14.8.5)

⇒ 세종로 차도 돌포장 정비계획(도로보수과-7101, ‘14.8.12)

○ 돌포장의 유출된 이음몰탈 충진에 따른 신규공종 추가

○ 세종로 정부종합청사 앞 파손 돌포장 보수에 따른 신규공종 추가(t=250㎜)

- 화강석 규격<300×600×200(t)>

○ 돌포장 정비물량 증가에 따른 관급자재량(화강석 판석) 변경 : 증 400㎡

○ 기타 물량 증․감

3. 설계변경 금액

(단위 :원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	300,000,000	720,000,000	증)420,000,000
도 급 비	225,500,000	586,800,000	증)361,300,000
관 급 비	64,500,000	113,200,000	증)48,700,000
이 전 비	10,000,000	20,000,000	증)10,000,000

4. 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 세종로 차도구간 일상유지보수공사 정비물량 변경에 따른 설계변경을 시행코자 함

따로붙임  1. 도로관리과 공문 사본 1부

2. 세종로 차도 돌포장 정비계획서 1부

3. 변경설계내역서 1부. 끝.