투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	관내포장도로굴착복구공사(연간단가) 설계변경(2회) 시행

우리사업소에서 시행중인 『관내포장도로굴착복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명  : 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

나. 도 급 자  : (유)다라니산업건설 대표 최형근

다. 공사기간  : 2014. 3. 26 ~ 2015. 2. 28

라. 설계변경내역(2회)

1) 공사비

(단위 : 원)

구 분		금 액(원)		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		3,796,736,340	3,369,284,700	감427,451,640
도급비	공급가액	1,477,531,546	1,477,531,546	-
	부가가치세	147,753,154	147,753,154	-
	계	1,625,284,700	1,625,284,700	-
관급자재비		2,171,451,640	1,744,000,000	감427,451,640	관급자재 시공물량 증·감

2) 굴착복구 시공물량 변경

(단위 : a)

구 분		계약물량(a)	변경물량(a)	증 ․ 감	비 고
소규모포장복구		104	110	증 6
소 계		281	350	증69
차로복구	평삭후 덧씌우기 (20a미만기준)	181	155	감26
	평삭후 덧씌우기 (50a기준)	100	195	증95

마. 변경사유 : 포장도로 굴착복구물량 및 차로별 복구물량 증․감

바. 예산과목

1) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구지원, 시설비및부대비, 시설비(굴착기금) No.2-1,378,800천원

2) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로유지보수, 시설비및부대비, 시설비 No.1-300,000천원

3) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비 No.11-210,000천원

붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.

3. 설계변경도서 1부.  끝

주무관	유현선		도로보수과장	손수희		동부도로사업소장	08/28 송상영
협조자	주무관	이민호		주무관	代김종범		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-4990	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0356	/전송	2040-0307	/		/	대시민공개