문서번호	기전과-6899
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이귀섭		김대진	08/28 송상영
협조

『2014년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

공 사  기 성  보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

동부도로사업소

(기전과)

『2014년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

공 사  기 성  보고

『2014년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 제 1회 공사기성을 보고 함.

공사개요

공 사 명 : 2014년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

공사개요 : 강남구, 서초구 일부 교통신호기 유지보수

공사기간 : 2014. 03. 21 ~ 2015. 02. 28.

계 약 자 : 남영전설(주)  대표 박 귀옥

계약금액 : 금463,991,000원

관련근거

책임감리사 (주)건영이앤씨 기성서류 제출 (건원14-08-08, 2014.08.26)

기성현황

○ 전회기성금액 : -

○ 금회기성금액 : 금130,350,000원(금일억삼천삼십오만원정)

○ 누계기성금액 : 금130,350,000원(금일억삼천삼십오만원정)

○ 누계율(%)   : 28.0%

○ 기성청구일 : 2014. 8. 21

○ 기성검사일 : 2014. 8. 25

○ 기성 주요내역

- 2014년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사 작업지시 1차 ~ 4차            · 제어기 5대 교체

· 신호등 2조 신설, 1조 교체, 8조 이설

· 신호등주 3본 신설, 3본 이설

· 잔여시간표시기 3개 신설

· 음향신호기 20대 신설, 40대 교체, 3대 이설

· 케이블 744m 신설, 564m 철거, 426 m이설(재설치)

· 기타시설 1식

기성금액

계약금액	전회기성금액	금회기성금액	누계기성금액	비고
463,991,000	-	130,350,000	130,350,000	-

조치의견 : 상기공사에 대하여 기성부분을 준공 처리코자 함.

대 완 료 일 :

관련대호 : 기전과0

관련대호 : 기전과0

붙임 : 1. 감리단 기성서류 제출공문 사본(기성검사조서 포함) 1부.

2. 기성내역서 1부.

3. 기성사진 1부. 끝.