문서번호	도로계획과-11082
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	도로정책팀장	도로계획과장
정용훈	이승석	전결 08/29 형태경

준공기한 연기 보고

(한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계용역)

2014. 8

도로계획과

준공기한 연기 보고

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계 용역

나. 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링 대표 한명식

다. 계약금액 : 금육천이백이십일만팔천오백원정(￦62,218,500)

라. 계약년월일 : 2014. 5. 13.

마. 착수년월일 : 2014. 5. 13.

바. 준공예정일 : 2014. 9. 09.

2. 보고내용

○ 위 용역에 대한 과업기간을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 연기 준공기한

- 당  초 : 2014년  9월 09일

- 변  경 : 2014년 12월 31일

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 현장조사결과 주변 지구단위계획(조계사 주변, 인사동, 종로 2· 3가) 및 주변 대규모 도시환경 정비사업, 조계사와 연도변 상가 건물의 민원 등 복잡한 사항을 종합 검토하고,

- 경찰청 교통규제 협의 등을 통해 최적의 도로공간 구조재편 방안을 수립코자 당초보다 상당기간 더 소요 예상

2014.  8.

보고자 : 지방시설주사보 정 용 훈   (인)