문서번호	설비부-9633
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박태욱	이달영	08/29 박기형

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

관급자재(가로등주) 규격변경 검토 보고

2014. 08.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

관급자재(가로등주) 규격변경 검토 보고

『남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사』에 필요한 관급자재 중 가로등주의 규격이 현장 여건과 불일치로 감리단에서 규격 변경 요청이 있어 검토 보고함.

관련근거

❍ 남부감 제14-251호(2014.8.25.) : 관급자재(가로등주) 구매 변경 요청

공사개요

❍ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사

❍ 공사기간 : 2009. 08. 03 ~ 2014. 12. 31

❍ 도 급 비 : 1,007백만원

❍ 공사규모 : L=1,160m(지하차도 736m, 4차선)

❍ 공사내용 : 수전설비 471kW, 가로등 106등, 지하차도등 903등, 기타1식

❍ 시 공 사 : (주)정안전기 외 1

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

계약내용(가로등주)

❍ 계약현황

납품번호	품 명	계약금액(원)	계 약 자	납품기한	비고
12-14-1-39335	가로등	68,510,000	에이컴조명(주)	2014.11.30

□ 변경사유

▶ 구매 요청한 가로등주 규격이 현장 여건과 상이하여 규격 변경

□ 상세변경내역

품 명	규 격		단 가		수 량		금 액		비고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
계							7,040,000	6,400,000
가로등주	10m	9.3m	470,000	440,000	8	8	3,760,000	3,520,000
가로등주	8m	-	400,000	-	1	-	400,000	-
가로등주	7m	6.3m	360,000	320,000	8	9	2,880,000	2,880,000

□ 변경금액

(단위:원)

품 목	당 초	변 경	증․감	비고
가로등주	7,040,000	6,400,000	감 640,000	수수료포함

Ⅳ. 조치의견

□ 상기와 같이 감리단에서 보고한 관급자재인 가로등주에 대한 규격변경 요청사항 대하여 검토한 결과 적정함으로 변경 구매 계약을 추진코자 합니다.

붙임 : 관급자재 구매 변경 요청 공문(감리단) 1부. 끝.