투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	공사변경계약체결 통보〔서부트럭터미널앞 지하차도 건설 신호공사(3차)〕

1. 설비부-9605(2014.08.29.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 공사계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약체결하였음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설 신호공사(3차)

나. 변경계약체결 현황

구 분		당 초	변경	비 고
계 약 자		우남전설(주) **** ***)	변경없음
계약금액	총차	325,449,000원	변경없음
	3차	267,520,000원	변경없음
공사기간	총차	2010.11.29.~ 2014.08.29	2010.11.29.~ 2014.10.15
	3차	2012.07.17.~ 2014.08.29	2012.07.17.~ 2014.10.15

붙 임 : 1. 공사변경계약체결통보서 1부.

2. 계약첨부서류 1부. 끝.

	건설총괄부장
주무관	이상일		경리과장	최영미		건설총괄부장	08/29 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-15899	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2372	/전송	02-3708-2365	/	bestman@seoul.go.kr	/	부분공개(6)