다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)태조엔니지어링 대표 한명식
(경유)
제목	준공기한 연기 알림

1. 서울시정 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 사에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인 ‘한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기예정임을 알려드리오니 변경계약 체결 등 필요한 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2014.09.09

- 변 경 : 2014.12.31

나. 연기 사유

- 현장조사결과 주변 지구단위계획(조계사 주변, 인사동, 종로 2· 3가) 및 주변 대규모 도시환경 정비사업, 조계사와 연도변 상가 건물의 민원 등 복잡한 사항을 종합 검토하고,

- 경찰청 교통규제 협의 등을 통해 최적의 도로공간 구조재편 방안을 수립코자 당초보다 상당기간 더 소요 예상. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	전결 08/29 형태경
협조자
시행	도로계획과-11144	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 도로계획과 10층	/
전화	02)2133-8067	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개