시의원 요구 자료 제출

시 행	주거재생과-11047
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		재건축팀장	주거재생과장	주거재생정책관	주택정책실장	결재
김홍군		이순하	안재혁	代안재혁	전결 08/29 진희선
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 282번, 강덕구 의원, 도시계획관리위원회)

강덕구 시의원(새누리당) 요구자료를 따로붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

강덕구 의원(도시계획관리위원회, 새누리당)

NO.282

* 방배 3구역 재건축사업 관련

- 사업지구 현황 및 추진경과

- 시공사 선정이 제대로 되지 않는 이유

□ 방배3구역 (주택재건축 정비구역)

【구역현황】

○ 위    치 : 서초구 방배동 992-1번지 일대

○ 면    적 : 15,078㎡

○ 용도지역 : 2종일반주거지역(7층)

○ 정비계획 : 지하2층, 지상14층 아파트 5개동 299세대, 용적률 250%

○ 토지등소유자 : 181명

【추진경위】

○ 2005. 06. 28. : 정비구역지정 주민제안

○ 2007. 08. 30. : 정비구역 지정고시(서울특별시고시 제2007-304)

○ 2009. 12. 30. : 조합설립추진위원회 승인

○ 2011. 08. 30. : 조합설립인가

○ 2012. 06. 05. : 건축심의 통과

○ 2013. 04. 03. : 사업시행인가

○ 2013. 12. 06. ~ ‘14.6.19 : 시공사선정 입찰공고(3회)

【시공사 선정이 되지 않은 이유】

○ 2013. 12. 6. 시공사 선정 입찰공고(미 선정)

- 2개 업체(코오롱, 한진) 참여하였으나, 제안내용의 현저한 차이로 조합총회에서 재입찰하기로 결정됨

○ 2014. 04. 14. 시공사 선정 입찰공고(유찰)

- 1개 업체(GS) 참여로 유찰

○ 2014. 06. 19. 시공사 선정 입찰공고 (진행중)

- 2개 업체(GS, 대우) 참여

【향후계획】

○ 2014. 9. 4. : 시공사 선정 조합총회 개최 예정  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (주거재생과)	담당사무관	이 순 하
	☎ 2133-7180	주무관	김 홍 군
	작 성 일 : 2014. 8. 29.