투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	제1회 설계변경(포장도로 복구공사-2구역)

우리사업소에서 시행중인 포장도로 복구공사애 대한 설계변경(제1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 포장도로 복구공사(연간단가-2구역)

나. 공사기간 : 2014. 4. 15 ~ 2015. 2. 27

다. 공사개요 : 절삭후덧씌우기 130a, 소파포장복구 24a

라. 도 급 자 : 인왕건설(주) 대표이사 권현순

마. 변경사유 : 물량 증감

바. 변경내역

구분		당초	변경	증 감	비고
도급비	공급가액	409,855,400	702,130,000	292,214,600
	부 가 세	40,981,540	70,213,000	29,231,460
	계	450,796,940	772,343,00	321,546,060

사. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	구희옥		주무관	윤신식		계약1팀장	김점선		도로보수과장	08/29 김효식
협조자
시행	도로보수과-7955	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동(양천길 237) 67-1	/
전화	2657-7951	/전송	2657-7960	/	kooheeok@seoul.go.kr	/	대시민공개