문서번호	물재생과-4310
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김학민		강병수	08/29 채희정
협 조

중랑천 유지용수공급시설 현장시험을 위한

약품구매 및 부대시설 설치계획

2014. 8.

물재생과

중랑천 유지용수공급시설 현장시험을 위한

약품구매 및 부대시설 설치계획

상수도연구원 물순환연구과-3528(‘14.8.5.)호와 관련하여 약품 현장시험에 필요한 약품구매 및 부대시설을 설치하여 차질없는 시험을 실시코자 함

Ⅰ		구매 및 설치사항

❍ 약품구매

- 구매약품 : PAC17%, PAHCS2020

- 구매수량 : PAC17% : 40톤
PAHCS2020 : 40톤

※ 우선 각 약품별 40톤을 구매하고 시험경과에 따라 추가구매

- 구매방법 : 조달구매

- 소요예산 : 금16,581,050원

· PAC17% : 7,600,820원(189,000원/톤×40톤+조달수수료40,820원)

· PAHCS2020 : 8,980,230원(223,300원/톤×40톤+조달수수료 48,230원)

- 구매업체 : 삼구화학주식회사

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비

❍ 펌프 구매

- 펌프구매

· 펌프사양 : 다이어프램형 연속류 무맥동 정량펌프 2대
(유량 : 2.1ℓ/min, 압력 : 10kgf/㎠)

- 구매방법 : 금액이 소액이고 설치가 시급함에 따라 최소견적을 제출한 펌프제조회사인 천세산업(주) 총판업체인 새롬이엔텍과 수의계약을 체결하여 구매

- 소요예산 : 금10,800천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비

❍ 부대시설 설치

- 설치시설 : 약품탱크(10t)2대, 약품배관 및 전선 설치

- 설치방법 : 금액이 소액이고 시험일정에 따라 설치가 시급함을 감안 최저견적을 제출한 에코텍에 수의계약하여 설치

- 소요예산 : 금14,100천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 시설비

Ⅱ		구매 및 설치 일정

❍ 약품구매

- ‘14.9.1일 한 완료

❍ 펌프 및 부대시설 설치

- ‘14.8.29. : 수의계약 시행

- ‘14.9.4.  : 시설설치 완료 예정

❍ 시험실시

- ‘14.9.4.  : 시설 설치 및 약품 충전 완료 후 상수도연구원 연구사와 시험실시

따로붙임 : 중랑천 용수공급시설 현장 실험 계획 보고 1부