문서번호	기전과-8058
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
박신범		정윤식	08/29 이승진
협 조
	주무관			백윤광

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)』

설계변경(1차) 검토 보고

2014. 8

북부도로사업소

(기전과)

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)』

설계변경(1차) 검토 보고

우리 사업소에서 추진중인 『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)」에 대해 감리사로부터 설계변경(1차) 서류가 접수되어 이를 검토하고 보고함

▢ 관련근거

○ 2014. 8. 25. 교통신호기공사 추가배정예산 사용 및 설계변경계획 보고

○ 2014. 8. 26. 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)

설계변경(1차) 제출(영호이앤씨)

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)

○ 시 공 사 : ㈜세진종합이엔씨 대표 이성임

○ 공사기간 : 2014. 4. 11 ~ 2015. 2. 28

○ 공사금액 : 415,724,850원

▢ 설계변경 추진내용

○ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증ㆍ감	비 고
계		415,724,850	504,514,850	88,790,000(증)	-
도급비	공사원가	377,931,682	458,649,864	80,718,182(증)	-
	부가가치세	37,793,168	45,864,986	8,071,818(증)	-

○ 설계변경 사유

- 교통신호기 면수조정 작업을 위해 추가 배정된 예산을 공사물량에 반영

- 연간단가 공사의 특성상 작업물량을 추정하여 공사가 추진되는 바, 작업지시 완료 후 당초 계약물량과 실제 공사추진에 따른 변경된 공사물량으로 변경 필요

○ 예산과목 : 도로교통 소통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리,

교통신호기 신설 및 보수, 시설비(교통사업특별회계)

▢ 검토의견

○ 감리사로부터 접수된 설계변경 서류를 검토한 결과 타당하여 설계변경 추진하고자 함

붙임 : 1. 설계변경검토서(감리사) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 추가배정예산 사용 및 설계변경계획 보고 1부.  끝.