문서번호	보행자전거과-9158
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	보행안전팀장	보행자전거과장	교통운영관		도시교통본부장
변재홍	이경우	이원목	代이원목		08/13 김경호
협 조

「 안전하고 편리한 자전거 이용 환경 구축을 위한 」

하반기 자전거 이용시설 정비계획

2014. 8.

도시교통본부

(보행자전거과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

『 안전하고 편리한 자전거 이용환경 구축을 위한』

‘14 하반기 자전거 이용시설 정비계획

강우 및 노후로 훼손된 자전거 이용시설에 대하여 정비 및 개선계획을 수립하여 안전하고 편리한 자전거 이용환경을 조성함으로서 자전거 이용 활성화에 기여 하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍  ‘14년 자전거이용시설 정비 및 관리계획〔보행자전거과-2519(`14.3.5)〕

- 우기 후 훼손된 시설물 위주로 정비

□ 시설현황

❍ 자전거도로 연장

구분	총연장	도로	교량	하천	공원
자전거 도로	707.6㎞	448.2㎞	8.0㎞	239.0㎞	12.4㎞

❍ 자전거 주차시설

구분	계		건물형		보관함		거치대
	개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수
주차시설	4,925	140,036	15	3,527	18	410	4,892	137,036

❍ 자전거도로 관리기관

- 특별시도 차도 구간 : 6개 도로사업소

- 특별시도 보도 및 구도 : 25개 자치구

- 공원 및 하천내 시설물 : 해당 시설물 관리기관

□ 추진경위

❍ ‘14. 3. 5 : `14년 자전거이용시설 정비 및 관리계획수립

- 상반기 정비 : 동절기 훼손된 시설물 정비 및 봄맞이 환경정비

- 하반기 정비 : 우기후 훼손된 시설물 위주로 정비

❍ ‘14. 6.25 : 하반기 정비대상 제출 요구(시→자치구)

❍ ‘14. 7.23 : 이용시설 정비대상 제출(자치구→보행자전거과)

❍ ‘14.7.24~31 : 현장 실태조사 및 정비대상 검토

□ 문 제 점

❍ 자전거도로 일부구간 단절로 주행의 연속성 결여

- 위계간 단절 : 하천 내 간선기능의 자전거도로와 생활권자전거도로

- 노선내 단절 : 교차로(횡단보도), 이면도로 등에서 연속성 미흡

❍ 포장색상이 다양하고 노면표시 관리미흡으로 자전거도로 인식 곤란

- 유색포장 통일성 미흡, 노면표시 등 시설관리 부족

❍ 불법 주정차, 물건적치, 방치자전거 등으로 자전거 이용환경 저해

□ 정비방안

❍ 단절된 구간을 찾아 연계함으로써 네트워크 구축 및 이용편의제공

- 노면표시 또는 유색포장시행으로 단절구간 해소

❍ 표지병, 노면표시 훼손 등 안전위해 시설물은 우선정비

❍ 안전하고 편리한 자전거 이용환경을 위해 훼손된 시설물 신속 정비

❍ 자전거 이용 성수기(9월~11월) 이전에 정비완료

- 우기로 훼손된 시설물에 대하여 일제 점검하여 성수기 전에 정비완료함 으로서 안전하고 편리한 이용환경 제공

Ⅱ		세부정비 계획

□ 정비대상 신청현황

❍ 정비대상 예산요구액 : 1,198,000천원(12개구 자치구)

- 30개 노선 22.5㎞ : 포장보수 9,491㎡ 기타 노면 및 안전표시 등

- 자전거도로 유형별

(단위 : 천원)

구 분	계	전용도로	전용차로	겸용도로
합 계	1,198,634	143,360	148,071	907,203
시 도	991,843	143,360	148,071	700,412
구 도	206,791			206,791

□ 예산 지원기준

❍ 지원대상

-  특별시도상 자전거도로 및 부속시설물

-  시도와 통합적 관리의 필요가 있는 구도구간(단절구간 연계 등)

❍ 우선순위

ⅰ) 특별시도상 차도에 설치한 자전거도로 설치구간

ⅱ)      ″     보도에            ″

ⅲ) 특별시도와 통합적 관리의 필요가 있는 구도구간

□ 대상지 결정 및 조정결과

❍ 재배정 요구액 : 1,198,000천원(12개구 자치구)

❍ 예산조정 결과 :   286.100천원(11개구 자치구)

- 도심구간(중구), 단절구간 연계(광진, 관악) 사업은 우선지원

- 송파, 중랑, 노원, 강서구는 지원기준에 따라 물량조정

- 성북구의 경우 하천변도로 정비요청으로 제외

〔예산 신청 및 조정결과〕

(단위 : 천원)

구 분		자치구 신청내역	1차 조정	2차 조정(확정)	비고
계		1,198,634	653,870	286,100
시도	차도	227,586	102,696	85,680
	보도	764,257	495,874	197,720
구도	차도	-	-	-
	보도	206,791	55,300	2,700
주요조정기준		-	도로사업소 설계기준 (제잡비 포함 40%)	우선순위 고려 시도,구도

❍ 유형별 구분

- 시설별 정비 구분

(단위 : 천원)

소계	시설물 정비		단절구간 정비
	금 액	시설규모	금 액	시설규모
286,100	230,280	·유색포장 4,180㎡ ·펜스설치 30m ·노면표시 346m ·안전표지 27개소 (9개구 19개노선)	55,820	· 2개구 2개노선 연장 1.5㎞ (자양로,봉천로)

- 자전거도로 유형별 구분

(단위 : 천원)

구 분	계	전용도로	전용차로	겸용도로
합 계	286,100	38,180	47,500	200,420
시 도	283,400	38,180	47,500	197,720
구 도	2,700			2,700

- 재배정 기관별 구분

(단위 : 천원)

연번	기관명	재배정금액		연번	기관명	재배정금액		연번	기관명	재배정금액
계		286,100		4	중랑	26,200		8	동작	1,500
1	중구	37,000		5	노원	55,900		9	관악	46,500
2	용산	20,000		6	은평	6,000		10	송파	33,000
3	광진	9,300		7	강서	48,000		11	강동	2,700

□ 정비개요

❍ 정비대상 : 자전거도로, 주차시설 및 편의시설

- 자전거도로 : 도로사업소 및 각 자치구에서 관리

· 하천, 공원 내 자전거도로 시설은 관리기관에서 자체 시행

- 주차시설 및 공기주입기 등 편의시설 : 자치구 관리

❍ 주요 정비내용

- 훼손된 자전거도로 포장 재정비

- 교통안전표지 파손 교체 보완

- 교차로, 진출입구 등 단절구간 연계 및 안전조치

[훼손된 시설사례]

관악구 봉천로 : 단절구간 연결(신설)	광진구 자양로 : 단절구간 연걸(안전표시)	은평구 진흥로 : 안전표지판 정비
중구 동호로 : 유색포장파손 정비	노원구 노원로 : 유색포장 파손 정비	송파구 오금로 : 안전시설(규제봉, 노면표시)

□ 예산 집행계획

❍ 예산집행

(단위 : 천원)

예산현액	기배정액	금회배정	배정잔액	비고
1,300,000	697,000	286,100	316,500*	순수잔액 136,500

* 자전거 활성화 구역 지원 금액(180,00천원)은 배정잔액에 포함됨

❍ 예산과목

- 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로유지보수, 시설비

❍ 향후 집행계획 : 배정잔액 316,500천원

- 자전거 이용 활성화 구역 추진 : 180,000천원

- 자전거도로 인프라구축 기본계획용역 및 긴급복구비 : 136,500천원

□ 행정사항

❍ 예산집행 후 결과 제출(‘14.12월) : 도로사업소, 자치구

❍ 공원․하천 내 자전거도로는 해당 시설물 관리기관에서 자체정비

- 공원 내 : 푸른도시국(공원녹지정책과)

- 하천 내 : 도시안전실(하천관리과), 한강사업본부(시설부)

❍ 긴급보수 필요 시설은 자체예산 활용보수 : 도로사업소, 자치구

□ 향후일정

❍ ‘14  8.       : 하반기 정비사업비 배정 (시→ 자치구)

❍ ‘14.8 ~ 9월 : 설계 및 공사

❍ ‘14. 9~11월 : 자전거도로 정비사업 시행

❍ ‘14.11~12월 : 공사준공

※ ‘14. 9월 : 자전거도로 인프라구축 기본설계 용역발주

붙임 : ‘14년 하반기 기관별 예산신청 및 재배정내역 1부   끝.

하반기 기관별 예산신청 및 재배정 내역

(단위 : 천원)

연번	기관명	신청내용			금회 재배정액	비고
		사업비	정비구간	유형
계		1,198,636			286,100
1	중구	37,440	동호로 포장파손, 노면표시 정비	시도 보도	37,000	도심구간
2	용산	20,400	서빙로고 51길 포장파손보수, 노면표시 정비	시도 보도	20,000	도심구간
3	광진	15,000	자양로 단절구간연결 안전표지, 노면표시 정비	시도 보도	9,300	단절구간연결
4	중랑	213,053,	신내로 포장파손보수, 노면표시, 펜스정비	시도 차도	26,200
5	성북	83,017	인촌로5길 포장파손보수, 노면표시, 안전표시	하천 도로	-	하천변 도로로 지원제외
6	노원	204,000	노원로 포장파손정비, 노면표시	시도 보도	55,900
7	은평	6,000	진흥로 안전표지판 정비	시도 보도	6,000
8	강서	194,678	수명로 포장파손보수, 노면표시 정비	시도 보도	48,000
9	동작	1,500	상도로, 노량진로 안전표시 정비	시도 보도	1,500
10	관악	63,845	봉천로 단절구간 연결, 포장보수, 안내표지, 노면표시 정비	시도 차도	46,500	단절구간연결
11	송파	357,003	홍제내길 노면표시	시도 차도 시도 보도	33,000
12	강동	2,700	망원동길외 1개노선 포장파손정비, 노면표시	구도 보도	2,700

`14년 유지보수 사업예산 집행계획

(단위 : 천원)

연번	총사업비	상반기 배정금액	활성화 구역 배정예정액	하반기 사업 배정예정액	배정 소계	집행잔액
계	1,300,000	697.400	180,000	286,100	1,163,500	136,500
1	서부	42,600			42,600
2	종로	43,500		-	43,500
3	중구	14,700		37,000	51,700
4	용산	-		20,000	20,000
5	광진	23100	60,000	9,300	92,400
6	동대문	29,300		-	29,300
7	중랑	-		26,200	26,200
8	성북	87,400			87,400
9	노원	51,300		55,900	107,200
10	은평	41,100		6,000	47,100
11	서대문	8,300		-	8,300
12	마포		60,000	-	60,000
13	양천	5,600		-	5,600
14	강서	35,000		48,000	83,000
15	구로	48,900		-	48,900
16	영등포	32,800		-	32,800
17	동작	57,700		1,500	59,200
18	관악	59,200		46,500	105,700
19	서초	19,800		-	19,800
20	강남	36,500		-	36,500
21	송파	48,200		33,000	82,200
22	강동	12,400	60,000	2,700	75,100
※ 집행잔액은 자전거도로 인프라구축 기본계획수립용역 및 긴급복구 예산으로 활용